투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(중랑교 보수,보강공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 “중랑교 보수.보강공사”와 관련하여 아래와  같이 준공기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바라며, 관련부서에서는 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 중랑교 보수,보강공사(장기계속)

나. 공사기간 : 2013.05.02 ~ 2014.12.31

- 금차(2차) 공사기간 : 2014.03.05 ~ 2014.06.27

다. 도 급 사 : 유성건설㈜ 이영주

- 교량관리, 일반교량관리, 중랑교 보수․보강공사, 시설비 및 부대비, 시설비

라. 준공기한 연기내역

구 분	당초 준공기한	변경 준공기한	비 고
총괄기간	2013. 05. 02~ 2014. 12. 31	2013. 05. 02~ 2014. 12. 31	변경없음
2차계약기간	2014. 03. 05~ 2014. 06. 27	2014. 03. 05~ 2014. 07. 30	증) 34일

마. 준공기한 연기사유 : 공사중 추가공종 발생(신축이음장치 덮개설치

및 전기시설〈펌프인입선〉이설)에 따른 공기 연장(별첨 참조)

바. 지체상금부과 여부 : 미부과

붙임  1. 준공기한 연기 관련서류 각 1부.

2. 합의서(도급사) 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),관리단속과장
주무관	임승민		시설보수과장	06/18 박춘배
협조자
시행	시설보수과-2309	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	02-2210-1558	/전송	02-2210-1549	/		/	대시민공개