함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(암수정수장 고도정수처리 정보통신공사_총차,5차분)

1. 우리 본부에서 시행중인 암사정수장 현대화 및 고도정수처리 건설 정보통신공사의 준공기한을 아래와 같이 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공  사  명 : 암사정수장 현대화 및 고도정수처리 건설 정보통신공사

나. 귀책소재 및 지체상금 부과여부

- 귀책소재 : 상수도사업본부

- 지체상금 : 미부과

다. 준공기한 연기내용

구분	당 초	변 경	비 고
전체	′09.09.09~ ′14.06.30	′09.09.09~ ′14.10.30	122일증
4차	′14.03.18~ ′14.06.30	′14.03.18~ ′14.10.30	122일증

라. 연기사유 : 정보통신 주요잔여공사(외곽울타리 방호용 CCTV설치)의 추진을 위해서는 토목공사(외곽울타리)가 선행되어야 하나 아직 미설치되어 본 공사 연기.

마. 공사금액 변경없음.

붙임 : 1) 준공기한 연기검토보고 방침서 1부.

2) 합의서 1부.  끝.

	기전설비과장
주무관	서기종		기전설비과장	06/18 서대훈
협조자
시행	기전설비과-4088	(		)	접수		(		)
우	120-030	서대문구 서대문로 94 (합동 27-1)	/
전화	02-3146-1337	/전송	02-3146-1319	/		/	대시민공개