문서번호	설비부-6473
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
이동기	조예환	06/18 박기형

『신림2 빗물펌프장 건설 전기공사』

준공(납품)기한 연기요청 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  6.

『신림2 빗물펌프장 건설 전기공사』

준공(납품)기한 연기요청 검토보고

『신림2 빗물펌프장 건설 공사』관련 책임감리원으로부터 선행 토목·건축공사 지연으로 인한 전기공사 준공(납품)기한 연기요청에 대한 검토 보고임.

공사개요

❍ 공사명 : 신림2 빗물펌프장 건설 전기공사

❍ 위  치 : 관악구 신림동 469

❍ 규  모

- 전기용량 : 22.9Kv, 2,500Kw, 2회선

- 전기공사 : 동력,제어,계측 배관·배선

❍ 공사기간 : '13.05.08 ~ '14.06.30

❍ 총사업비(도급+관급) : 1,526백만원

❍ 시공사 : 대영이엔에프(주)

❍ 감리사 : ㈜도화엔지니어링, ㈜제일엔지니어링

관련근거

❍ 준공기한 연장 검토보고 - 감리단

- 신림감 제2014-159,160,161(2014.06.11)

공사 및 관급자재 현황

(단위 : 천원)

공사명 (품 명)	계약번호 (납품요구번호)	계약자	계약금액		준공(납품) 기한		비 고
신림2빗물펌프장 건설 전기공사	20130471646	대영이엔에프(주)	1차	50000000	1차	‘14.06.30	도급
			총차	420,427,420	총차	‘14.06.30
수배전반	12132127000	청석전기	1차	116,687,800	1차	‘14.06.30	관급 총액계약
			총차	640,000,000	총차	‘14.06.30
자동제어반	12132133900	베스텍	1차	83,338,610	1차	‘14.06.30	관급 총액계약
			총차	144,500,000	총차	‘14.06.30

감리단 의견

❍ 연기사유 : 선행 토목·건축공사 공기지연(토목및건축 구조물 완료시기 7~11월 예정)에 따른 전기공사 준공기한 연장이 필요함.

❍ 준공(납품)기한 연기

품 명	계약자	당초 준공 (납품) 기한		변경 준공 (납품) 기한		비 고
신림2빗물펌프장 건설 전기공사	대영이엔에프㈜	1차	‘14.06.30	1차	‘14.12.15	(증)168
		총차	‘14.06.30	총차	‘14.12.15
수배전반	청석전기(주)	1차	‘14.06.30	1차	‘14.12.15	(증)168
		총차	‘14.06.30	총차	‘14.12.15
자동제어반	베스텍(주)	1차	‘14.06.30	1차	‘14.12.15	(증)168
		총차	‘14.06.30	총차	‘14.12.15

❍ 지체지상급 부과여부 : 미부과

검토의견

❍ 감리단의 검토의견과 같이 선행공정 일정에 맞추어 원활한 공사가 추진될 수 있도록 전기공사 준공(납품)기한 연기를 위해 건설총괄부로 계약변경의뢰 요청하고자 함.

따로붙임 : 감리단 준공(납품)기한 연기요청 보고서 3부.   끝.