투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	준공(납품)기한 연기요청(신림2 빗물펌프장 건설 전기공사)

우리 본부에서 시행 중인 『신림2 빗물펌프장 건설공사』와 관련 선행 토목 및 건축 공정이 지연됨에 따라 원활한 공사추진을 위해 아래와 같이 전기공사 준공(납품)기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공사명 : 신림2 빗물펌프장 건설 전기공사

2. 준공(납품)기한 연기요청 현황

품 명	계약자 (계약번호)	당초 준공 (납품) 기한		변경 준공 (납품) 기한		비 고
신림2빗물펌프장 건설 전기공사	대영이엔에프㈜ 20130471646	1차	‘14.06.30	1차	‘14.12.15	도급공사
		총차	‘14.06.30	총차	‘14.12.15
수배전반	청석전기(주) 12132127000	1차	‘14.06.30	1차	‘14.12.15	관급 (총액계약)
		총차	‘14.06.30	총차	‘14.12.15
자동제어반	베스텍(주) 12132133900	1차	‘14.06.30	1차	‘14.12.15	관급 (총액계약)
		총차	‘14.06.30	총차	‘14.12.15

3. 연기사유 : 선행 공종 지연으로 설치시기 미도래

4. 지체상금 : 미부과

따로붙임 : 1. 준공(납품)기한 연기요청 검토 보고서  1부.

2. 준공(납품)기한 연기요청 공문 각 1부.   끝.

	설비부장
주무관	이동기		건축설비과장	조예환		설비부장	06/18 박기형
협조자
시행	설비부-6487	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8630	/전송	02-3708-8659	/	ilovey2@seoul.go.kr	/	대시민공개