문서번호	시설보수과-2312
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최태석		박춘배	06/18 정진오
협 조

준공기한 연기보고

(폐기물 처리용역-이문고가 보수.보강공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06

성동도로사업소

(시설보수과)

준공기한 연기보고

우리 사업소에서 추진중인 ‘폐기물 처리용역(이문고가 보수.보강공사)’를 시행 함에 있어, 준공기한 연기사유가 발생하여 이에 대한 검토 보고임

1		사업개요

□ 용 역 명 : 폐기물 처리용역(이문고가 보수.보강공사)

□ 용역기간 : 2013.05.15. ~ 2014.06.30.

□ 도 급 비 : 30,327천원

□ 도 급 자 : ㈜에스제이티 외 1개사

2		준공기한 연기

□ 사  유

○ 본 용역의 대상공사 시행 중 교량받침 교체를 위한 브라켓 추가 설치 등 공기 부족으로 준공기한을 연기한 사항으로, 본 용역  또한 공사에 맞춰 준공기한을 연기 시행해야 할 실정임

□ 기  간

○ 당초 준공기한 : 2014.06.30.

○ 변경 준공기한 : 2014.07.31.(31일 연장)

□ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

3		조치의견

□ 상기 보고내용과 같이 본 공사의 실 공사기간이 부족하여 준공기한을 연기한 사항으로, 본 용역 또한 연기 조치하여 내실을 기하고자 함

붙임  공사 준공기한 연기보고서 1부. 끝.