문서번호	시설보수과-2301
결재일자	2014.6.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	06/18 정진오
협 조

준공기한 연기보고

[중랑교 보수ㆍ보강공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6

성동도로사업소

준공기한 연기 보고

우리사업소에서 추진중인『중랑교 보수ㆍ보강공사』를 시행함에  준공기한 연기사유가 발생하여 이에 대한 검토 보고임

Ⅰ		사 업 개 요

공 사 명 : 중랑교 보수ㆍ보강공사

공사기간 : 2013. 05. 02 ~ 2014. 12. 31

(2차 : 2014. 03. 05 ~ 2014. 06. 27)

도 급 비 : 3,021,010,230원(2차:1,790,463,200원)

공사개요 : 교면포장 30a, 보도정비 7.5a, 받침교체 168개소,

브라켓 설치 98개소, 교각 내진보강 6개소

슬래브 강결 154m, 신축이음교체 200m 등

도 급 자 : 유성건설주식회사 대표 이영주

Ⅱ		준공기한 연기

관련근거 : 시설관리공단 공사감독2처-9036(2014.6.17)

사    유

○ 보도부 신축이음장치 덮개 설치 및 교량하부 단면증대를 위한  전기시설(펌프인입선) 이설에 따른 절대공기 부족

- 보도부 신축이음장치 덮개 설치 : 18일

- 전기시설(펌프인입선) 이설     : 16일

준공기한 연기

- 총차 : 준공기한 변경없음

- 2차  : 당초 준공기한 : 2014.06.27

변경 준공기한 : 2014.07.30(증34일)

관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조

지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		조 치 의 견

상기 보고내용과 같이 본 공사기간이 부족한 사항으로 준공

기한을 연기 조치하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 시설관리공단 검토보고서 1부.  끝.