문서번호	도시철도토목부-6684
결재일자	2014.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토목1과장	도시철도토목부장
문병종	김성호	06/19 이은상

「지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사 책임감리용역」

계약금액 조정계획 검토보고

【 총괄(2회), 5차(1회)】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06

서울특별시도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『서울 지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사』

전면책임감리용역 계약금액 조정계획 검토보고

【총괄(2회), 5차(1회)】

공사장 안전사고 재발방지 개선대책에 따라 안전분야 감리원을 증원 투입하여 현장안전관리에 만전을 기하고자 하며, 감리원 증원에 따른 계약금액 조정 계획 검토 보고임(총괄 및 5차)

<공사장 안전사고 재발방지 개선대책, 행정2부시장 방침 제318호, 2013.10.17.>

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 지하철 9호선 3단계 923공구 전면책임감리용역

○ 용역기간 : 2010.08.05. ~ 2015.12.31.

○ 용역금액 : 3,896,899천원

○ 계 약 자 : ㈜동명기술공단 종합건축사사무소 대표이사 신완수

□ 변경내용

○ 용역기간

- 총괄 : 2010.08.05 ~ 2015.12.31(변경없음)

- 5차  : 2014.05.20 ~ 2015.04.14(변경없음)

○ 계약금액 및 투입인원

- 총괄(2회)

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증․감	비고
계약금액 (천원)	계	3,896,899	3,991,899	증 95,000
	기 계약	3,896,899	3,896,899		특별회계
	안전분야 감리		95,000	증 95,000	일반회계
투입인원 (인․월)	계	351.130	360.267	증 9.137
	기 계약	351.130	351.130
	안전분야 감리	-	9.137	증 9.137

- 5차(1회)

‧ 계약금액

(단위:천원)

구 분		총 괄(2회)	기발주 (1~4차)	5차(1회)		장 래
				당 초	변 경
계약 금액	계	3,991,899	1,370,000	590,000	685,000	1,936,899
	특별회계	3,896,899	1,370,000	590,000	590,000	1,936,899
	일반회계	95,000	-	-	95,000	-

‧ 투입인원

구 분		당 초	변 경	증․감	비고
투입인원 (인․월)	계	53.085	62.222	증 9.137
	기 계약	53.085	53.085
	안전분야 감리	-	9.137	증 9.137

○ 변경사유

- 공사장 안전사고 재발방지 개선대책(전문 감리원 증원배치 계획)으로 기투입된 안전전담 감리원에 대한 계약금액 조정

※ 안전감리원 투입현황

‧ 감리원 : 안전분야 1명

‧ 투입기간 : ‘14.5.20 ~’15.3.31

‧ 자격  : 건설안전산업기사

□ 예산과목

○ 일반회계 : 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 공사장안전관리 대책   추진, 감리비

○ 특별회계 : 도시기반시설본부, 도시철도건설, 도시철도건설사업, 도시철도9호선3단계건설, 시설비 및 부대비, 감리비

□ 조치계획

○ 상기와 같이 안전분야 감리원 1인 추가 투입에 따른 계약금액을 조정(총괄 및 5차)하여 감리용역 업무시행에 만전을 기하고자 함

첨부 1. 감리단 공문 1부.

2. 변경내역서(총괄2회 및 5차1회) 각 1부.

3. 합의각서(총괄 및 5차). 끝.