문서번호	시설보수과-4911
결재일자	2014.6.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
류춘광		김권일	06/19 代김효식
협조

「2013년 개봉고가차도 보수공사」 현장 실정보고사항 검토 (공간비계 구조검토)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013. 6.

강서도로사업소

(시설보수과)

현장 실정보고 사항 검토

“2013년 개봉고가차도 보수공사” 관련, 공간비계 구조검토 시행에 대하여 현장 실정보고 사항이 접수되어 검토 후 처리하고자 합니다.

∇ 관련문서: 서울특별시 시설관리공단 공사감독1처-4890 (‘14.6.17), 4881호 (‘14.6.17)

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : “2013년 개봉고가차도 보수공사-강서” (계약이행보증공사)

공사개요 : 바닥판 재포장 1,960㎡, 단면보수 85㎡, 공간비계 906㎡

(원계약 공사 중도타절 물량 : 바닥판 재포장 567㎡, 공간비계 260㎡)

공사기간 : 2014.4.28 ~ 2014.8.31.(원계약 ‘13.8.22~12.31)

공사금액 : 605,984,900원 (원계약 752,984,900원)

계 약 자(보증이행업체) : ㈜삼우아이엠씨 대표 김기헌, 대경건설산업(주) 대표 최덕순

감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단

Ⅱ		현장 실정보고 사항

보고사항 : ‘공간비계 구조검토 시행’에 관한 건

○ 현황 및 문제점

- 당초 설계서 상 개봉고가차도 하부 단면보수 및 표면보수를 위한 공간비계를 설치토록 되어 있으며

- 공간비계 설치구간은 지하철(1호선) 및 남부순환로가 통과하고 있어 차량 및 작업자의 안전사고 예방을 위해 공간비계 안정성에 대한 구조검토가 필요한 실정임

○ 검토내용(시설관리공단)

- 공간비계 시공상세도

- 공간비계 안전성에 대한 구조검토가 필요한 사항으로, 2013년 준공한 “2012년 개봉고가차도(철도구간) 바닥판 교체공사”시 공간비계에 대해 구조검토한 “제일건축구조기술사사무소”에 의뢰하여 그 결과에 따라 시행함이 타당하다고 판단됨

※ 3개사 견적: 제일건축구조기술사사무소(1,500천원), 성진구조안전기술단(2,000천원), 연구조엔지니어링(2,000천원) - 부가세 별도

검토의견

○ 당초 설계시 바닥판 상면 재포장(워터젯)시 하부 안전확보 및 하면 단면·표면보수 작업을 위하여 설치하는 공간비계에 대하여 구조안전성에 대한 구조기술사의 검토가 필요한 바, 시설관리공단의 검토내용과 같이 시행함이 타당함.

※ 도로시설과-6845호(‘14.4.17) “도로시설물 유지관리 및 공사현장 안전관리 철저”

- 가시설 상세도 작성 및 구조안전 검토 등 안전관리에 경각심을 갖고 공사장 관리 철저

Ⅲ		처 리 의 견

시설관리공단의 실정보고 사항을 승인 처리하여 보수공사 추진에 만전을 기하고, 공사비 변동사항은 추후 설계변경시 정산 처리코자 합니다.

첨부 :  현장 실정보고서(시설관리공단).  끝.