투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	백두산호랑이숲 전시물 제작설치 공사 변경계약 요청

1. 총무과-7611(2014.5.30)호와 관련입니다.

2. 위 대호로 기 계약 체결된 『백두산 호랑이숲 전시물 제작설치 공사』변경계약을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울대공원 백두산 호랑이숲 전시물 제작설치 공사

나. 도 급 자 : ㈜도둠디자인 김명희

다. 도 급 액 : 금일억사천칠백만원(￦ 147,000,000원)

라. 공사기간 : 2014. 3. 31 ~ 2014. 6. 20

마. 설계변경사유 : 심사위원(제안서평가) 건의에 따른 전시물 추가 및 기간 연장

바. 변경내용 : 계약금액 변경 및 기간 연장

구 분	당 초	변 경	증 · 감
도급금액	147,000,000원	151,800,000원	증4,800,000원
공사기간	2014. 3. 31 ~ 6. 20(82일)	2014. 3. 31 ~ 6. 28(90일)	8일 연장

아. 예산과목 : 서울대공원운영, 공원이용 시민만족도 향상, 다양한 축제 및 볼거리프로그램 운영, 동물전시프로그램 개발 운영, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 보고 방침서 1부

2. 변경내역서 및 합의서 1부.  끝.

	동물기획과장
주무관	김효준		주무관	강경숙		동물기획과장	06/19 代김보숙
협조자
시행	동물기획과-4775	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장길 102	/	http://www.grandpark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-500-7995	/		/	대시민공개