투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	백두산호랑이숲 전시물 제작설치 공사 준공기한 연장 의뢰

1. 총무과-4466(2014. 3.31)호와 관련입니다.

2. 위호로 계약 체결하여 추진 중인『백두산 호랑이숲 전시물 제작설치 공사』와 관련하여 아래와 같은 사유로 준공기간을 연장하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울대공원 백두산 호랑이숲 전시물 제작설치 공사

나. 도 급 자 : ㈜도둠디자인

라. 계약금액 : 금일억사천칠백만원(￦ 147,000,000원)

마. 공사기간

○ 당 초 : 2014. 3.31 ~ 2014.5.29(60일)

○ 변 경 : 2014. 3.31 ~ 2014.6.20(82일)

바. 계약금액 : 변동없음

사 연기사유 : 전시물 완성도 향상을 위한 디자인 수정 및 조형물 설치 위치 재조정 등으로 기간이 소요되어 전시물 제작을 위한 기간 부족

붙임 : 준공기한 연기 검토 보고서 1부.  끝.

	동물기획과장
주무관	김효준		주무관	강경숙		동물기획과장	05/28 김태원
협조자
시행	동물기획과-4230	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장길 102	/	http://www.grandpark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-500-7995	/		/	대시민공개