다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	최규하가옥 전기증설공사 계약변경 요청

1. 최규하가옥 전기증설공사와 관련하여 아래와 같이 계약내용을 변경하고자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 건 명  : 최규하가옥 전기증설공사

나. 계 약 업 체  : 백산전기건설공사

다. 계 약 금 액  : 금일백만원정(￦1,000,000)

라. 과 업 내 용  : 전기증설

마. 계약년월일 : 2014. 6. 17.

바. 계 약 기 간  : 2014. 6. 20. ~ 2014. 6. 29.

사. 변 경 사 항  : 계약금액 변경

- 당초 : 금일백만원정(￦1,000,000원 > 변경 : 금육십이만일천육백원(￦621,600원)

아.  계약금액 변경 사유

- 전기증설 시 시설부담금을 한국전력공사에 납부하도록 되어 있으나, 이 사업의 경우 계약전력 감소 후 원 계약전력 복구 요청으로서 3년 이내에는 시설부담금이 면제되는 경우에 해당되어 당초 계약금액에서 시설부담금을 제외하고자 함

붙임 1. 계약변경사유서 1부

2. 변경내역서 및 변경 산출내역서 각 1부

3. 합의각서 1부. 끝.

	역사문화재과장
주무관	조영훈		문화재연구팀장	김수정		역사문화재과장	06/20 황요한
협조자
시행	역사문화재과-13222	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 5층 역사문화재과	/
전화	02-2133-2640	/전송	02-768-8873	/	nationsuban@seoul.go.kr	/	부분공개(6)