문서번호	행정지원과-9759
결재일자	2014.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강동수도사업소장
임승용	김인웅	장성만		06/20 원응연
협 조

전기실 및 기계실 바닥 환경정비 계획

2014. 06

강동수도사업소

(행정지원과)

전기실 및 기계실 바닥 환경정비 계획

최근들어 각종 재난사고가 다수 발생함에 따라 각종 시설물에 대한 철저한 안전관리를 통한 재난․안전사고 예방의 중요성이 강조되고 있는바, 우리사업소 청사 중요장비가 있는 전기실과 기계실의 미관해소와 안전한 관리를 위하여 “전기실 및 기계실 바닥 환경정비”를 시행하여 깨끗한 환경조성과 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

◦ 도시안전과-9459호(2014.4.22.)시설물안전관리 철저 요청

◦ 국토안전부건설과-1619호(2014.4.17)시설물안전관리 철저

□ 문 제 점

◦ 전기실 및 기계실은 준공무직 직원이 근무하는 사무실과 중요장비가 있으나 현재 바닥제의 수명이 다하여, 콘크리트 먼지발생으로 환경과 미관을 저해하며 고가장비의 고장의 원인이 되며, 특히 장마철에 방수가 안되 녹발생과 수명단축 및 감전사고등 재난사고 발생등 안전사고 대비가 필요함.

□ 추진개요

◦ 현 황

- 위 치 : 청사 지하 기계실 및 전기실

- 전기실․기계실 장비 : 수배전반, 비상발전기, 냉․온수기, 보일러, 각종펌프 등

전기실(시공전)	기계실(시공전)	시공후(에폭시코팅)

◦ 규 모 : 137.16㎡(41.56평)

- 전기실 : 48.6㎡(가로9,000× 세로5,400)

- 기계실 : 88.56㎡(가로8200×세로10,800)

◦ 주요공정

- 철거공사(기존 바닥제 철거)

- 미장공사(바닥 고르기 및 수평잡기)

- 방수공사(에폭시 코팅)

□ 추진일정

◦ 2014. 6.20 : 발주계획수립

◦ 2014. 6.23~25 : 계약 및 착공

◦ 2014. 6.25~30 : 바닥제 철거 및 방수 및 준공

※작업은 주말 및 업무에 지장이 없는 시간대에 시행

□ 계약 및 예산

◦ 계약방법 : 소액 수의계약(전자시담)

◦ 소요예산 : 약 7,900천원

◦ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비

수선교체유지비(시설장비유지비).

◦ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항5호

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(안전행정부예규 제404호, 2012. 3. 22)

□ 기대효과

◦ 시설물에 대한 철저한 안전관리를 통한 재난 ․ 안전사고 예방과 깨끗한 환경조성과 안전한 시설물관리에 기여.  끝