다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울시 동부간선도로 확장 총사업비(기간연장) 조정 요청(6차)

1. 동부간선도로 광역도로(녹천교~의정부시계) 확장 구간에 대한 총사업비 관리와 관련하여, 지역여건 변화와 지역주민 민원등으로 총사업비(사업기간 연장)변경 사항이 발생하여 별첨과 같이 총사업비 조정을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

2. 금번 총사업비 조정(기간연장)은 기존 도로의 통행체계 유지를 위하여 현재 공정율이 43%로서 도봉지하차도 등 사업내용의 상당 부분이 시공되고 있는 상태로 동부간선도로 확장사업은 서울시민 뿐만아니라 상대적으로 낙후된 경기동북부지역 주민의 교통불편을 해소하고 지역균형발전을 위한 사업임을 감안하여 본 광역도로 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 총사업비 조정(기간연장) 승인에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 사업기간 변경 요구내역

구분	현행	변경요구	비고
서울시구간	2004년 ~ 2015년	2004년 ~ 2017년	- 하천공사 우기시 중지 공기부족 - 소음민원 공사 단계별 착공시기 지연 - 철도이설 지연 공사중지기간 증가

붙임   총사업비 조정요구서 1 부.  끝

	서 울 특 별 시 장
수신자	국토교통부장관(광역도시도로과장),국토교통부장관(투자심사담당관)
주무관	조선휘		도로시설계획팀장	한정수		도로계획과장	06/20 형태경
협조자
시행	도로계획과-7820	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 태평로1가 서울시청 본관 10층 도로계획과	/
전화	02-2133-8082	/전송	02-2133-0763	/	groba@seoul.go.kr	/	대시민공개