투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신	내부결재
(경유)
제목	총인처리시설 시운전 용역 계약기간 변경

총인처리시설(A2O공법) 시운전 용역수행 중 계약기간 변경 사유가 발생되어 아래와 같이 계약기간을 변경하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 총인처리시설(A2O공법) 시운전 용역

나. 용역기간 : 2014.03.26.～2014.6.26

다. 계 약 자 : ㈜삼천리엔바이오 대표 박종운

라. 변경 사항

변경내용	당 초	변 경	비 고
계약기간	2014.03.26.～2014.6.26	2014.03.26.～2014.7.18

마. 예산과목 : 난지물재생센터운영관리, 난지물재생센터운영, 공공운영비

바. 변경사유 : 총인처리시설의 안정화 후 운영 조건에 필요한 운영인자 등 자료 확보를 하기 위함(붙임 자료 참조).

붙임  1. A2O공법 시운전 용역(변경) 과업내용서 1부

2. A2O공법 시운전용역 중간보고회 결과보고서1부1부. 끝.

주무관	유기준		관리과장	김웅남		난지물재생센터소장	06/20 정흥순
협조자
시행	관리과-5929	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기도 고양시 덕양구 대덕로426(현천동) 관리과	/
전화	300-8530	/전송	300-8518	/		/	대시민공개