함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	뚝도 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임사업관리자
(경유)
제목	총괄공사 수정공정표(공기연장) 검토보고서에 대한 보완 요청

1. 뚝도CM 2014-189(2014. 5.19)호와 관련입니다.

2. 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 관련 공기연장을 위한 수정공정표 승인 요청에 대하여 아래와 같이 보완 요청하니 조치하시기 바랍니다.

가. 수정공정 요청 : 당초 – 2009.12. 4 ~ 2015. 1. 6(1860일)

변경 – 2009.12. 4 ~ 2016.12.31(2585일)

나. 보완사항 : 시설현대화 및 고도정수처리시설공사가 최대한 조기 완공 될                             수 있도록 공기 재조정하여 수정공정표를 제출하시기 바람. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	송병욱		고도정수반장	전결 06/20 이임섭
협조자
시행	고도정수반-2421	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1435	/전송		/		/	대시민공개