설계변경(3차) 심의 의뢰서

공사명 : 2013 중구,용산구 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

의 뢰 부서명	중부수도사업소 급수운영과
공사 감독원	지방시설주사 박혁순
검토 의뢰일시	2014. 06. 19

검 토 의 견 서

○ 공사명 : 2013 중구.용산구 관내 포장도로 굴착복구공사

○ 검토일시 : 2014.06.19

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

급수운영과장

김영삼

06/20

김영삼

적정함

위    원

시설관리팀장

최명익

최명익

적정함

위    원

주무관

한상근

한상근

적정함

위    원

급수설비팀장

이병운

이병운

적정함

위    원

주무관

최현태

최현태

적정함

담    당

주무관

박혁순

박혁순

설계변경(3차) 사유서

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2013 중구, 용산구 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

나. 공사개요 : 아스팔트 125a, 콘크리트 5a, 보도블록41a, 아스팔트표층75a

다. 공사기간 : 2013.07.01 ~ 2014.06.30

**************************

**************************

2. 설계변경 사유 및 금액

공 종	단위	당초면적	변경면적	증,감
아스팔트	a	125.0	62.69	감) 60.31
콘크리트	a	5.0	0.05	감) 4.95
보도블록	a	41.0	16.9	감) 24.10
아스팔트표층	a	75.0	29.5	감) 45.50

가. 2013 중구, 용산구 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)의 시공물량      증․감 발생(변경 내역서 참조)

나. 설계변경 금액 내역

(단위 : 원)

******	****	****	*****	비 고
****	*************	***********	*************
*****	*************	***********	*************
*****	***********	***********	*************

첨부 : 설계변경 관련 서류 1부.  끝.