문서번호	시설과-4267
결재일자	2014.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
김준회	나용제	김소영		06/20 강홍빈
협 조
	주무관		이준의

경교장 관람시설 환경정비 개선 추진계획

2014. 6

서울역사박물관

시설과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	문화재설계전문업체	)	무□
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

경교장 관람시설 환경정비 개선계획

경교장을 2013. 6월 인수하여 부족한 관람시설을 환경정비 보수하고,안내 전시콘텐츠 등 시민들에게 홍보 전달함으로서 인지도 상승 및 전시관람환경을 개선에 기여하고자 함

Ⅰ				경교장 개요

❍ 규모 : 토지 396㎡, 건물 906㎡(지하1층/지상2층,철근콘크리트조)

- 방재시설 : 소화기 10대, CCTV 3대, 지하 환기시설 설치

- 건립연대 및 주체 : 1938년 광산부자 최창학에 의해 건립

Ⅱ				추진배경

❍ 관람시설 정비분야

- 천연슬레이트 지붕판 파손, 탈락 등 보수하고자 함

- 창문 캐노피 죠인 부분 파손으로 창문 누수 요인이 있음

- 2층 응접실 창호 선반 목재 부식에 따른 민원사항이 있음

- 경교장 내 편의시설 개선 필요(안내촉지도, 점자블럭, 제습기 등)

- 경교장 내부 벽체가 회벽으로 관람이용객의 옷에 흰가루가 묻으며,    또한 벽체에 오염이 심하여 관람민원이 끈이지 안고 있음

- 응급실 쪽 출입문으로 구급차 경광등 불빛으로 관람에 지장

❍ 안내표지(전시콘텐츠)

- 기존 경교장 출입구 외부에 설치된 안내표시판으로는 다양한 전시콘텐츠 안내에 어려움이 따르고 경교장 존재여부에 대한 정보전달이 미흡하여 경교장의 인지도 저하의 원인으로 작용

Ⅲ				주요 추진계획

❍ 관람시설 정비분야

- 시중에 천연슬레이트 생산하는 곳이 없어 기존 하단부 기와를 상단으로 올려 파손, 훼손 되어 있는 기와를 교체 보수하고 또한 규격, 모양은 다르지만 경교장 창고에 일부 비치되어 있는 천연슬레이트를 가공 후  하단부에 대체 설치함

- 창문 캐노피 방수 및 창선대 목재 부식 수지처리 조치

- 장애인 편의시설 안내촉지도, 점자블럭, 핸드레일 점자표지판, 미끄럼 방지 논슬립, 커튼, 제습기 설치

❍ 안내표지(전시콘텐츠)

- 키오스크 형태(논터치 DID)

․  45인치, 16:9(화면비율) 논터치 스크린

- 키오스크 외함

․  방수, 방열, 항습 적용

․  문화재 외벽 손상 없는 이동가능형 외함제작

․  탈부착 및 연장 가능한 전원연결 시스템 적용

안내 키오스크 위치	<지붕 기와 빠짐>
경교장 실외용 DID(키오스크)	창문 캐노피 죠인트 파손

Ⅳ				추 진 경 위

❍ 2013.  6.   : 경교장 인계인수 과정에서 부족한 시설 요구 역사문화재과에서 사업비 확보 후 통지(국비) (역사문화재과→문화재청)

❍ 2014.   3. 7 : 경교장 장애인, 관람편의시설 예산 배정(역사문화재과→박물관)

❍ 2014.   5    : 관람시설 정비보완 현황조사

Ⅴ				사업비 사용계획

❍ 사 업 비   : 50,000천원(국비/시비)

- 설계용역비 : 4,350천원

. 계약방법 : 소액으로 설계전문업체와 수의계약

. 설계자 : 종합건축사사무소 대연(문화재 실측설계 전문업체)

경교장 원형복원 설계자

. 근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령제25조1항5호,

지방자치단체 수의계약 운영요령 제3절 2호)

- 안내시설(전시콘텐츠) : 15,000천원

. 계약방법 : 계약금액이 소액으로 수의계약 시행

. 근거 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령제25조1항5호,

지방자치단체 수의계약 운영요령 제3절 2호)

- 관람시설 보수정비 : 30,215천원

. 계약방법 : 공개경쟁 입찰 시행

※ 예산과목 : 역사문화의계승발전, 문화재보존복원, 정부수반유적복원정비,                            시설비(401-01)

Ⅵ				향 후 계 획

❍ 2014.  6. 19 ~ 20   : 계획수립 방침

❍ 2014.  6. 20 ~ 25    : 설계용역 발주(문화재청 설계승인 심사)

❍ 2014.  6. 25         : 문화재청 설계승인 심사

❍ 2014.  7. 25         : 승인보완 및 설계준공

❍ 2014.  7. 30          : 공사발주

❍ 2014.  7. 30 ~ 9.30 : 공사시행

❍ 2014.  9. 30          : 공사준공

Ⅶ				행 정 사 항

❍ 문화재보호법에 의거 문화재 형상변경허가 및 설계심사.

성과지표 :   2. 업무의 합리적개선 노력

13. 관람 환경의 적정성

14. 고객 만족도

끝.