문서번호	토목부-11882
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
조현형		명경출	06/23 노우성
협조
	주무관		이석우

물가변동(E/S)에 의한 계약금액 조정검토

(겸재교 건설 및 연결도로확장공사 전면책임감리용역)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06.

도시기반시설본부

(토 목 부)

물가변동(E/S)에 의한 계약금액 조정검토

(겸재교 건설 및 연결도로확장공사 전면책임감리용역)

「겸재교 건설 및 연결도로 확장공사 전면책임감리용역」 계약사로부터 물가변동에 의한 계약금액 조정요청이 있어 이에 대한 검토 보고임.

관련근거

동일(감리) 제14-948호(2014.05.27.)와 관련임

용역개요

○ 용 역 명 : 겸재교 건설 및 연결도로확장공사 전면책임감리용역

○ 사업위치 : 중랑구 면목동 ~ 동대문구 휘경동

○ 개    요 : 주교량 L=18.24m, L=235m,  접속교 L=15m, L=160m

도로확장 B=20~25→30m, L=750m, 보도육교 2개소

폐기물처리용역 및 전기공사 감리 등

○ 용역기간 : 2008.10.10 ~ 2015.12.31

○ 용 역 비 : 2,771,000천원

○ 감 리 사 : ㈜동일기술공사 외 1개사

관련규정

지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률 제22조(물가변동등에 따른 계약금액의 조정)

동법시행령 73조 및 동법시행규칙72조(물가변동 등으로 인한 계약금액의 조정)

기술용역계약 일반조건 15조(물가변동에 의한 계약금액의 조정)

계약금액 조정대상 여부 검토

계약금액 조정요건 : 2가지 조건 동시 충족

- 계약체결후 또는 직전 물가변동으로 인한 계약금액 조정일로부터 90일이상 경과

- 품목조정율이 100분의3이상 증감된 경우

계약금액 조정방법 : 품목조정율(기술용역계약 일반조건 제15조)

계약금액 변경 내역 : 조정 대상

구 분	계약일	직전기준일	91일 기점	조정기준일	공정율	비고
일 자	2008.09.26	2010.01.01	2010.04.01	2014.01.01	70.52%

계약금액 변경 내역

내  역                                                            (단위:천원)

계약금액	계약이행금액	물가변동 적용금액	품목조정율	물가변동 조정금액	조정계약금액	비 고
2,771,000	1,954,150	816,850	5.30%	43,290	2,814,290

보고자 조치의견

관련 규정에 의해 물가변동으로 인한 계약금액 조정요청 건에 대하여 검토한 결과 변경 계약하는 것이 타당할 것으로 판단되어 추후 설계변경시 반영 조치하고자 합니다.  끝,