문서번호	녹지관리과-6149
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	녹지관리과장	중부공원녹지사업소장
김대수	진동엽	최병언	06/23 배호영
협 조

“한양도성 순성길(남산.낙산) 조성공사” 실정보고사항 검토결과보고

2014. 06.

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

“한양도성 순성길(남산.낙산) 조성공사” 실정보고사항 검토결과보고

『한양도성 순성길(남산·낙산)조성공사』시행중, 공사감독 위탁기관인 서울특별시 시설관리공단이 요청한 『실정검토 내용 제출』(공사감독3처-5669호, 2014.6.18.)에 대하여 검토하고, 아래와 같이 보고합니다.

▢ 공사개요

가. 공 사 명 : 한양도성 순성길(남산, 낙산) 조성공사

나. 도 급 액 : 금434,766,800원

다. 발 주 처 : 중부공원녹지사업소 녹지관리과

라. 공사기간 : 2013. 12. 26 ~ 2014. 05. 24

마. 도 급 자 : (주)그룹이십일 대표 이용훈

바. 공사내용

- 철거 및 제거공사 : 가림막 등 21종 철거, 단풍나무 등 28종 390주 제거

- 식재공사 : 할미꽃 등  7종 77,120주(본)

- 시설물공사 : 데크계단 등 7종

▢ 보고내용 및 조치계획

○ 서울시시설관리공단에서 요청한 실정사항 검토내용

구분	현황 및 검토의견(공단)	검토 의견(우리사업소)	비 고
남산 N타워 ~ 캠프모스	▶ 성곽흔적표시 설치 제외 - 성곽흔적표시 : 93㎡→0㎡	▶서울시 한양도성도감과에서 성곽흔적 표시를 위한 별도의 실시설계용역을 시행중이며, 별도 발주예정으로 성곽 흔적표시 설치 제외
	▶팔각배드민턴장 주변 축성돌에 대해 한양도성자문회의 전문가 자문결과 반영으로 - 순성길은 축대아래 기존 산책길을 현 상태로 활용(이정표 및 안내판 설치) - 배드민턴장 인근에 수목이식 및 정비 최소화 - 임목폐기물(폐목재) : 404㎡ → 369㎡ - 흙포장 : 315㎡ → 296㎡ - 순성길 이정표 : 0개 → 5개	▶팔각배드민턴장 주변 축성돌에 대해 한양도성자문회의 전문가 자문결과 반영 - 순성길은 축대아래 기존 산책길을 현 상태로 활용(이정표 및 안내판 설치) - 배드민턴장 인근에 수목이식 및 정비 최소화 - 임목폐기물(폐목재) : 404㎡ → 369㎡ - 흙포장 : 315㎡ → 296㎡ - 순성길 이정표 : 0개 → 3개(5개는 너무 많아 3개로 조정)

구 분	현황 및 검토의견(공단)	검토 의견(우리사업소)	비 고
남산 N타워 ~ 캠프모스	▶남산순환로 주변에 설계된 초화류를 위치 조정 하며 억새 식재를 추가 발주처 요청으로 - 양지꽃 : 18,300본 → 14,030본 - 애기나리 : 21,390본 → 10,320본 - 할미꽃 : 6,770본 → 8,070본 - 억새 : 0본 → 8,070본 - 성토 : 28㎡ → 0㎡	▶초화류 위치 조정 및 억새 추가 식재 - 양지꽃 : 18,300본 →14,030본 - 애기나리 : 21,390본 →10,320본 - 할미꽃 : 6,770본 → 8,070본 - 억새 : 0본 → 8,070본 - 성토 : 28㎡ → 0㎡
후암배드민턴장	▶팔각배드민턴 동호회 면담결과를 설계에 반영 요청 - 후암배드민턴 관리소 철거후 증축하여 팔각 배드민턴 동호회와 같이 사용토록 하였으나 후암배드민턴 동호회의 반대로 별도 시설물 설치 【후암배드민턴】 - 관리소철거(4*4) : 1동 → 0동(존치) - 관리소(3*6) : 1동 → 0동 - 콘크리트포장 철거 : 4㎡ → 29㎡ - 지주봉철거 : 0개소 → 3개소 - 점토블럭포장 : 9㎡ → 0㎡ - 포장구분경계석 : 13M → 0M - 자연석판석이설 : 0㎡ → 7㎡ - 배드민턴 지주 : 0조 → 3조 【팔각배드민턴】 - 경계석 철거 : 0M → 28M - 원주목 계단철거 : 0단 → 31단 - 관리소A(4*4) : 0동 → 1동 - 퍼골라 이설(4*4) : 0동 → 1동 - 라인벨트 : 0면 → 1면 - 마사토다짐 : 0㎡ → 273㎡ - PE조립식 배수로 : 0M → 38M - 원주목계단A(W1200) : 0단 → 26단 - 원주목계단B(W2000) : 0단 → 6단 - 원주목계단C(W3200) : 0단 → 5단 - 목재휀스 : 0경간 → 39경간 - 등의자 : 0개소 → 6개소 - 배드민턴 지주 : 0조 → 1조 - 배드민턴 네트 : 0개소 → 1개소 - PE 집수정A : 0개소 → 1개소 - PE 이중벽관 : 0M → 8M	▶ 승인
	▶ 남산체육회 건물 및 체육시설물 이설 위치를 상춘약수터로 변경합의로 아래 물량조절 ○ 바닥 : 목재데크 ○ 쉘터이설(자재재활용), 가림막, 사무실 1동, 이동식 화장실 1동 ○ 체육시설물 이전 등 - 그늘막철거 : 1식 → 0식 - 화강석계단철거 : 1식 → 0식 - 운동기구A철거 : 1개소 → 0개소 - 운동기구B철거 : 1개소 → 0개소 - 운동기구C철거 : 1개소 → 0개소 - 운동기구D철거 : 1개소 → 0개소 - 운동기구E철거 : 1개소 → 0개소 - 운동기구F철거 : 1개소 → 0개소 - 운동기구G철거 : 1개소 → 0개소 - 운동기구H철거 : 2개소 → 0개소 - 운동기구I철거 : 2개소 → 0개소 - 콘크리트포장철거 : 4㎡ → 0㎡ - 경계석철거 : 27M → 0M - 목조건물철거 : 0동 → 1동 - 목재배수로 철거 : 0M → 12M - 지주봉철거 : 0개소 → 1개소 - 화강석계단 : 1식 → 0식 - 쉘터(24m*5m) : 1개소 → 0개소 - 남산산악회 도색 : 1식 → 0식 - 남산산악회 바닥방수 : 48㎡ → 0㎡ - 남산산악회 벽체방수 : 99㎡ → 0㎡ - 데크(24m*4m) : 1식 → 0식 - 배수관 : 2M → 0M - 데크-1(11.5m*11.1m) : 0식 →1식 - 소운반비(남산산악회) : 35230kg→0KG - 자재 소운반비(상춘약수터) : 0kg → 7929KG - 허리돌리기 이설 : 0개소 → 1개소 - 등허리지압기 이설 : 0개소 → 1개소 - 공중걷기 이설 : 0개소 → 1개소 - 평의자 이설 : 0개 → 1개 - 관리소B : 0동 → 1동 - 이동식화장실 : 0동 → 1동 - 쉘터 이설 : 0개소 → 1개소[해제+조립] - 목재휀스 : 0경간 → 14경간 - PE조립식배수로 : 0M → 33M - PE 집수정A : 0개소 → 1개소 - PE 이중벽관 : 0M → 4M	▶남산체육회 건물 및 체육시설물 이설 위치를 상춘약수터로 변경합의로 물량 변경 승인함. 단, 상춘약수터에 설치하는 바닥데크는 천연목재(방부목)으로 설계되어 있으나 천연목재(방부목)은 시간이 지나면 수분 건조에 따른 뒤틀림, 갈라짐 현상으로 유지관리가 어려움이 있으므로 가격이 비싸나 오래되어도 수분 건조에 따른 뒤틀림, 갈라짐 현상이 없어 유지 관리가 쉽고 오래갈 수 있는 수지합성목재로 설계 (목재테크 자재비교 검토표 : 붙임) - 상춘약수터 데크 : 도면 참고

구 분	현황 및 검토의견(공단)	검토 의견(우리사업소)	비 고
캠프모스구간	▶ 캠프모스구간 산림훼손을 최소화하여 위험 수목제거 - 수목제거(R20) : 0주 → 1주 - 수목제거(R30) : 0주 → 1주 - 수목제거(R36) : 0주 → 2주 - 수목제거(R46) : 0주 → 1주	▶캠프모스구간 산림훼손을 최소화하고 성곽을 가리고 있는 수목 제거
낙산	▶낙산 현장여건에 맞게 추가 보식 - 화살나무 : 270주 → 390주 - 회양목 : 0주 → 330주 - 자산홍 : 0주 → 230주 - 영산홍 : 0주 → 180주	▶수목 수량이 적어 차폐 및 주변과 어울리게 추가 보식
	▶ 관급물량 조정 - 억새 : 0본 → 8,070본 - 이동식화장실 : 0동 → 1동 - 순성길이정표 : 0EA → 3EA	▶ 관급물량 조정 - 억새 : 0본 → 8,070본 - 양지꽃 : 18,300본 → 14,030본 - 애기나리 : 21,390본 → 10,320본 - 할미꽃 : 6,770본 → 8,070본 - 이동식화장실 : 0동 → 1동 - 순성길이정표 : 0EA → 3EA

▢ 보고자 의견

❍ 상기 실정 검토사항에 대한 변경된 내용은 선 시공, 후 설계변경하고자 함.

❍ 설계변경시 예산 증가가 발생시 예산 잔액을 활용하고자 함.

첨부 : 현황사진 1부.  끝.