문서번호	총무과-9232
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	총무부장
우명근		최대봉	06/23 서영관
협조	주무관		장보금
	주무관		황호익

한강 여름 캠핑장 전원공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

한강사업본부

총 무 부

한강 여름 캠핑장 전원공사 계획

한강 여름 캠핑장의 운영본부, 매점, 바베큐존 등에 사용되는 전력을 공급하여 캠핑장에서 시민이 휴가를 즐기수 있는 환경을 조성코자 함.

※ 운영과-4794(2014.6.17.)『2014년 여름 캠핑장 조성․운영 기본계획』

Ⅰ		캠핑장 현황

○ 운 영 기 간 : '14. 7.19(토) ~ 8.19(화) <32일>

○ 장소 및 규모 : 4개공원 500동

공원명	위 치	면 적	동 수
뚝 섬	청담대교 상류 잔디밭	18,800㎡	100동
잠 실	잠실대교 하류 잔디밭	8,620㎡	100동
잠 원	한남대교 하류 잔디밭	8,280㎡	100동
여의도	마포대교 하류 너른들판	29,300㎡	200동

Ⅱ		전기공급 계획

○ 시설별 전기사용 현황

사용장소	주요 용도	소요전력
운영본부(종합안내소)	에어컨, 컴퓨터, 핸드폰충전기 등	6(kw)
매 점	고기쇼케이스, 얼음보관 냉동고, 온수통, 에어컨 , 조명 등	38(kw)
카 페	얼음보관 냉동고, 커피머신	10(kw)
바베큐존	대형선풍기, 조명	3(kw)
용품대여소	대형선풍기, 조명	3(kw)
프로모션부스	조명	2(kw)
협찬사프로모션부스	공연 및 이벤트	45(kw)

○ 전원공급

- 3개소(뚝섬, 잠실, 잠원)는 안내센터 전기수전반 2차측에서, 1개소(여의도)는 물빛분수 전원공급 2차측에서 전원 공급

- 단상 전원공급시 부하 불평형 등이 발생하고 전력공급에 한계가 있어 3상 4선식으로 현장 분전반까지 배전

Ⅲ		공사발주계획

○ 공 사 명 : 한강 여름 캠핑장 전원공사

○ 위    치 : 캠핑장 4개소(뚝섬, 잠실, 잠원, 여의도)

○ 공사개요

⁃ 전선관 배선  ELP 65∅×402m,  ELP 40∅×336m 등

⁃ 메인분전함 4개소, 현장 분전함 8개소 등

○ 공사기간 : 계약일로부터~2014. 7. 18.까지

○ 공 사 비 : 금99,242,000원

○ 입찰 및 계약방법 : 제한경쟁입찰(지역제한) - 긴급

○ 입찰참가자격 : 전기공사업법에 의한 면허소지자로 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체

○ 예산과목 : 한강공원관리 및 운영, 시민중심의공원관리 및 한강문화 활성화, 한강공원시설 관리 및 개선, 한강공원 이용시설 보수 정비, 시설비

Ⅳ		향후계획

○ 공사발주  : ‘14. 6. 23.

○ 공사착공  : ‘14. 7. 4.

○ 공사완료  : ‘14. 7. 18.

붙임 : 설계서 1부.  끝.