문서번호	공간정보담당관-6502
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공간정보개발팀장	공간정보담당관
이용익		김태준	06/23 조봉연
협조

2014년 공간정보 플랫폼 기능 개선 사업

주간보고(6월 3주차)

2014.6.

공간정보담당관

주간업무보고서
사 업 명		2014년 공간정보 플랫폼 기능 개선 사업
기 간		2014.06.16.~2014.06.20.(6월 3주차)			보 고 일	2014년 6월 20일
수 신 처		부 서		서울시 공간정보담당관	담 당	이용익 주무관
발 신 처		회 사		(주)다울지오인포	담 당	김재호 부장
주 요 내 용		○ 계정 변경용 어플리케이션 테스트 진행 ○ 다국어 지도 모바일 웹 검색 페이지 화면구성안 작업 ○ 네이버/다음 공공화장실 OpenAPI 연동 방안
	분류		업무 진행 현황				진행율
금주 실적	분석/계획		○ 다국어 지도 모바일 웹 검색 페이지 화면구성안 작업 ○ 기능요약표 작성				100% 100%
	운영		○ 어플리케이션 서울시 계정 변경 관련 - 어플리케이션 테스트 진행 ○ 네이버 OpenAPI 연동 방안 작성 ○ 아이투어서울 맵에 희망서울 로고 삽입 관련 진행 여부 확인 작업 - 안드로이드 등록 완료 : 6월 12일 - 아이폰 등록 심사 중 - 내주 초까지 심사 진행일 경우 (주)어니언텍에 확인 요청 예정				50% 100% 80%
	구축		○ 다국어 지도 모바일 웹 검색 페이지 퍼블리싱 작업 - 기초 작업 진행 - 기본 페이지 레이아웃 설정 ○ CMS 음성 데이터 필드 추가 작업 - 엑셀 등록폼 추가 작업				20% 70%
	지도태깅 콘텐츠		○ 서울스토리 - 한강이 말걸다 콘텐츠 수정 ○ 민방위대피소 콘텐츠 분석 ○ 서울시 패밀리존 콘텐츠 분석				50% 90% 30%
차주 계획	분석/계획		○ 서울형 지도태깅 공유마당 화면 구성안 기획				30%
	운영		○ 어플리케이션 서울시 계정 변경 - T스토어 / 올레마켓 / U+ 계정 등록 진행 - 등록 일자 : 6월 26일 ○ CMS 업데이트 - 일자 : 6월 26일 - 음성 등록 / 엑셀 등록(사용여부 포함) ○ WAS 서버(I, II) 로그 파일 삭제 - 일자 : 6월 26일 ○ 운영 통계 보고서 작성 - 6월 27일 제출 ○ 아이투어서울 맵에 희망서울 로고 삽입 관련 진행 여부 확인 작업 - 아이폰 등록 확인 - 아이폰 등록 확인 후 진행보고서 작성				100% 100% 100% 100% 100%
	구축		○ 다국어 지도 모바일 웹 검색 페이지 퍼블리싱 작업				60%
	지도태깅 콘텐츠		○ 서울스토리 - 한강이 말걸다 콘텐츠 등록 작업 - 한강이 말걸다 POI 아이콘 수정 작업 ○ 서울시 패밀리존 - 서울시 패밀리존 콘텐츠 등록 - 서울시 패밀리존 아이콘 작업 ○ 지도태깅 콘텐츠 테마 배경 아이콘 작업				80% 100% 100%
산출물	○ 기능요약표_V.1.1.0_20140620(수정안).xlsx ○ 서울시공공화장실정보연동_제공방안_20140619(안).pptx ○ 다국어지도검색용모바일웹페이지_V.1.2.0_20140620(수정안)pptx
이슈사항	○ 어플리케이션 계정 이관시 다운로드 승계 가능 여부 확인 중 - 아이폰 App Store / 구글 마켓에 문의 메일 발송 (6/12) ○ WAS 서버(I, II) 로그 파일 삭제 - Web-logic 업체와 미팅을 통한 로그 파일 삭제 진행(6/26, 목)
협조 사항
對 서울시
對 용역업체	○ 7월초 디자이너 미팅 - 공지사항 이미지 작업 및 전체 디자인 가이드 작업
기타	○ Web-logic 업체와의 서버 로그 삭제 작업 진행 협조
주간 보고서 협의 사안
○ 다국어 지도 모바일 웹 검색 페이지 화면구성안 확정 ○ 네이버/다음 공공화장실 OpenAPI 연동방안 보고
주간보고 회의내용
1. 새주소 업데이트 ○ 새주소 표출 오류 사항 체크 및 새주소 업데이트 실시 ○ 새주소 업데이트 정보 월간보고를 통해 보고 2. CMS 등록 및 다운로드 엑셀 파일 정리 ○ 표출 / 미표출에 대한 항목 추가 ○ 엑셀 폼 중 ‘열’에 대한 우선순위 및 순서 정리 3. 기타 CMS 및 스마트서울맵 기능 개선 내용 ○ ‘스마트서울맵’ 상세페이지 이미지 표출시 플리킹 기능 추가 ○ ‘CMS' 엑셀 등록 오류에 대한 리포팅 기능 추가 ○ 'CMS' 기능 항목별 가/불가에 대한 정의 필요 ○ 기타 리스트 및 관리에 대한 기능 개선 사항 정리 필요 4. 고지도 맵핑 서비스 개발 관련 ○ 역사박물관 책자를 참조하여 서비스 기획 및 개발 진행 ○ 고지도 레벨 좌표 매핑 관련 내용 정리 ○ 반투명 관련 가능성 여부 확인 ○ 지도 맵핑 등록 과정에 대한 정의 필요 (사용자 등록 여부, 관리자 직접 입력) 5. 서버 시스템 속도 체크 ○ 동접자 테스트 ○ 멀티미디어 / 이미지 사용시 트래픽 부하 관련 체크 필요 ○ 7월초까지 서버 시스템 속도 체크 계획 수립