함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(영등포 1정수지내부방식공사-1차 및 총차)

1. 우리센터에서 시행중에 있는 『영등포 1정수지 내부방식공사-1차, 총차』에 대하여 설계변경 사전심의를 마치고 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 영등포 1정수지 내부방식공사

나. 도 급 자 : ㈜엘씨엠이엔지  대표 박미애

다. 계약기간 : 변경없음

- 총차 : 2013.09.23~2014.12.18

- 1 차 : 2013.09.23~2014.09.30

라. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,

마. 설계변경 사유 :

- 바닥자재 공법변경으로 공종 및 물량 증･감.

- 관급자재 사급자재로 변경(폴리 우레아)

바. 설계변경 주요 내역 :

- ECO-PANEL방수방식(바닥)외 4개 공종

사. 변경금액                                      (단위 :원)

구 분	1차수 금액			총 금액
	당초 금액	변경 금액	증, 감	당초 금액	변경 금액	증, 감
도 급 비	415,918,200	471,903,850	증)55,985,650	908,168,200	1,026,080,000	증)117,911,800
관 급 비	505,690,000	196,900,000	감)308,790,000	1,059,733,000	410,889,870	감)648,843,130
총공사비	921,608,200	668,803,850	감)252,804,350	1,967,901,200	1,436,969,870	감)530,931,330

따로붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 보고서 1부.

3. 설계변경 심의결과 의결서 1부.

4. 계약금액 검토결과 1부.

5. 합의서 1부. 끝.

주무관	고재연		정수시설과장	김구식		소장	06/23 정남기
협조자	주무관	김근태		계약1팀장	김점선
시행	정수시설과-3354	(		)	접수		(		)
우	150-110	서울 영등포구 노들로11(양화동 1-29)	/
전화	02-3146-5673	/전송	02-3146-5691	/	yeon1539@seoul.go.kr	/	대시민공개