투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	한양도성연구소장
(경유)
제목	변경계약체결 통보(용역)

1. 한양도성연구소-2111(2014. 06. 18)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 변경계약 의뢰한 사업에 대하여 아래와 같이 변경계약 체결 되었으니 참고하시기 바라며, 아울러 준공기한내 준공신고를 제출토록하여 지체상금이 부과되는 일이 없도록 업체에 안내하여 주시기 바랍니다.

가. 건      명 : 2014년 한양도성전시관 개관특별전 전시시설물 제작설치 용역

나. 계약금액 : 금54,147,520원(변경없음)

다. 계약업체 : 주식회사 어바웃디앤피(대표자:신덕영)

라. 변경계약일자 : 2014. 06. 23.

마. 변경사유 : 전시일정 변경에 따른 전시설물 철거일정 연기 조정

바. 준공기한 : 2014. 09. 30(당초 : 2014. 06. 30.)

붙임 :  변경계약서 1부.  끝.

	경영지원부장
주무관	이강준		총무과장	연규승		경영지원부장	06/23 김소영
협조자
시행	총무과-6891	(		)	접수		(		)
우	110-062	서울특별시 종로구 새문안로 55	/	http://www.museum.seoul.kr
전화	02)724-0170	/전송	02)724-0241	/	lgj1011@seoul.go.kr	/	부분공개(7)