문서번호	설비부-6657
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
변인수		조예환	06/23 박기형
협조

준공기한 연기 검토 보고

(송정 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사)

2014.  6.

도시기반시설본부

(설  비  부)

준공기한 연기 검토 보고

(송정 외 1개소 빗물펌프장 증설 전기공사)

송정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사 관련, 선행공종(토목, 건축) 지연에 따른 공사 및 관급자재 준공(납품)기한 연기에 대한 검토 보고임.

관련 공문

□ 공사, 관급자재 준공(납품)기한 연기 검토 보고[동화 C14-50호(2014.06.23.)]

실정보고 내용

□ 전기공사 준공기한 변경내용

구 분	준공기한		비 고
	당 초	변 경
총 차	2013.04.12.~2014.07.20	2013.04.12.~2014.12.12	계약금액 변동없음
2 차	2014.04.01.~2014.07.20	2014.04.01.~2014.12.12	“

- 연기사유 : 선행공종(토목, 건축) 지연에 따른 후속공정 연기

- 지체상금 부과 여부 : 미부과(시공사 귀책사유 없음)

□ 관급자재(계측감시제어설비) 납품기한 변경내용

구 분	납품기한		비 고
	당 초	변 경
1 차	2014.07.20	2014.12.12	계약금액 변동없음
2 차	2014.07.20	2014.12.12	“

- 연기사유 : 선행공종(토목, 건축) 지연에 따른 설치시기 미도래

- 지체상금 부과 여부 : 미부과(납품사 귀책사유 없음)

□ 관급자재(수배전반) 납품기한 변경내용

구 분	납품기한		비 고
	당 초	변 경
총 차	2014.7.20	2014.12.12	계약금액 변동없음

- 연기사유 : 선행공종(토목, 건축) 지연에 따른 설치시기 미도래

- 지체상금 부과 여부 : 미부과(납품사 귀책사유 없음)

조치의견

□ 송정 및 사근빗물펌프장 펌프실 증축공사 지연으로 공사 및 관급자재 준공(납품)기한 연기가 불가피 함.

□ 납품기한 변경내용에 대해 계약부서인 건설총괄부에 연기 의뢰코자 함. 끝.