문서번호	기전과-4371
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
차준원	채희준	06/23 최주용

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

준공기한 연기요청에 따른 검토 보고(왕십리2구역-신호)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 06

성동도로사업소

(기 전 과)

『교통안전시설물 원인자 부담공사』

준공기한 연기요청에 따른 검토 보고

교통안전시설물 원인자 부담공사 준공기한 연기 요청이 있어 관련서류 및 현장 확인후 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 교통안전시설물 설치공사(왕십리2구역-신호)

공사구간 : 서울시 성동구 왕십리뉴타운 제2구역주택재개발 신축현장 주변

공사기간 및 지연사유

구분	공사기간		지연사유	비고
	변경 전	변경 후
신호	2014.04.08 ~ 2014.04.15	2014.04.15 ~ 2014.07.15	교통신호제어기 온라인리포트 수령지연

원인자 및 관련업체 현황

구분	설계	감리	시공	원인자
신호	영호이앤씨(주)	서울시강북감리	미래월드안전(주)	왕십리뉴타운제2구역주택재개발정비사업조합

Ⅱ		검 토 결 과

-교통안전시설물 설치에 대한「교통안전시설물 원인자부담공사」준공기한 연기요청 건에 대하여 검토 한바, 교통신호제어기 온라인 리포트 수령지연으로 상기공사에 대하여 준공기한을 연기 승인코자 합니다.

첨  부 : 1. 준공기한 연기요청 1부. 끝.