다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	돈의문터~서소문터 멸실된 한양도성 연결방안 기획용역 계약기간 연장 요청

1. 한양도성도감-5656(2014.6.23.)호와 관련입니다.

2. 우리부서에서 진행 중인「돈의문터~서소문터 멸실된 한양도성 연결방안 기획용역」의 계약기간을 아래와 같이 연장하고자 하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역 개요

- 용역명 : 돈의문터~서소문터 멸실된 한양도성 연결방안 기획용역

- 계약기간 : 2014. 3. 31 ~ 6. 28

- 수행기관 : 서울시립대학교 산학협력단 외 1 (대표 황은성)

- 계약금액 : 20,150,000원(금이천십오만원정)

나. 변경내용 : 계약기간 연장

- 계약기간

․ 당  초 : 2014. 3. 31 ~ 6. 28

․ 변  경 : 2014. 3. 31 ~ 7. 31

- 변경사유

․ 한양도성 단절구간 연결의 선도사업으로 전체 사업의 방향성과 기준을 잡는 중요한 사업으로 심도 있는 검토를 위해

연관된 용역사업과 기본방향 공유 및 검토시간이 필요하며, 한양도성자문위원회 자문 등 의견청취에 충분한 기간 반영이 요구됨.

․ 또한, 사업구간이 대부분 사유지구간으로 기본구상이 완료될 경우 사전 시민과 협의과정이 필요한 점 등을 감안할 때 용역 수행에 필요한 절대기간이 부족하므로 계약기간을 연기하는 것임.

붙임  1. 용역 변경 추진방침서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	한양도성도감과장
주무관	이정식		도성보존팀장	문인식		한양도성도감과장	06/23 권기홍
협조자
시행	한양도성도감-5658	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 시청별관1동 5층	/
전화	02-2133-2663	/전송	02-2133-1063	/	chambbit@seoul.go.kr	/	대시민공개