문서번호	세무과-13740
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		세외수입팀장	재정사업단장
조수정		양주춘	06/23 백일헌
협조
	주무관		남일진

2014년 세외수입종합징수시스템 운영 및 유지보수 부분준공(1차) 검사 결과 보고

재정사업단

2014년 세외수입종합징수시스템 운영 및 유지보수 사업

부분 준공(1차) 검사 결과 보고

2014년도 세외수입종합징수시스템 운영 및 유지보수 용역 사업과 관련하여 부분(1차) 준공 검사를 실시하고 결과 보고함.

※ 근거 : 검사원지정요구(재무과-28143, 2014.6.18.)

Ⅰ				사업개요

❍ 사 업 명 : 세외수입종합징수시스템 운영 및 유지보수 용역

❍ 사업기간 : 2013. 3. 18. ~ 2014. 2. 28 (12개월)

❍ 계 약 자 : 사이텍스정보기술(주)

❍ 계약금액 : 399,840천원 (부가가치세 포함)

❍ 과업내용

- 세외수입종합징수시스템 추가개발 및 기능개선

- 세외수입종합징수시스템 응용SW 운영 및 유지보수

- 세외수입종합징수시스템 상용SW 유지보수

Ⅱ				부분 준공 (1차) 내역

❍ 대상기간 : 2014. 3. 18 ~ 5. 31 (약3개월)

(단위:천원)

구분		계약금액	부분 준공 (1차,3.18~5.31)	비고
(부분)준공일자			´14. 6. 23	공정율 23.51%
(부분) 준공 금액	계	399,840	94,002
	추가개발 및 기능개선	66,413	10,646	과업 이행 내용에 의한 준공
	운영 및 유지보수	256,886	64,221
	상용SW 유지보수	76,541	19,135

【선급금 지급에 의한 사업비 지출 현황】                            (단위:천원)

구분	계	선급금 (2014.3월)	1차 지출 (금회)	비고
지출액	216,338	159,936	56,401
선금정산액			37,601	선금정산액=선급금x(부분준공금/계약금액)
부분준공금			94,002

Ⅲ				검사(검수) 개요

❍ 검사(검수) 기간 : 2014. 6. 18  ~ 6. 20 (3일간)

❍ 검수자

- 근거 : 서울특별시 재무회계규칙 제111조에 의거

주관과 담당 사무관, 주관담당자 6급 이하 1명 지정

(용역 2억원 이상에 해당)

- 현장감독공무원 : 전산 6급 조수정 주무관

- 준공 검사자 : 세외수입팀장, 전산7급 남일진 주무관

❍ 검사(수) 방법 : 현장감독공무원이 1차 확인후 준공검사자가 최종 검사

❍ 검사(수) 내용 : 사업수행계획서를 기준으로 하여 검사

1) 과업 이행 실적 검사

검사분야	주요검사내용	비고
추가개발 및 기능개선	개발 성과물(산출물) 검토	기능점수(FP) 산정 (실적/계획)
응용SW 운영 및 유지보수	- 추진 실적 검토 · 사용자 문의 응대 · 프로그램 보완 사항
상용SW 유지보수	- SW별 제조사 정기점검 이행여부 - 자체 정기점검 이행 여부

- 각 분야별 사업수행계획서에 정의된 계획을 기준으로 산정

2) 사업관리 분야 검사

- 월별 인력투입 실적

- 사업 공정 단계에 따른 산출물 작성 여부 검사

Ⅳ				검사 결과

1) 과업 이행 실적 검사

과업 이행 내용

검사결과

비고

추가개발

및 기능개선

❍ 임의고지 관리시스템 구축

- 임의고지 관리시스템 운영 개시 (2014. 6. 18)

- 개발 산출물 작성 : 완료보고서외 20종

- 기능점수 산정 결과 : 당초 계획보다 개발 범위 증가

(계획 : 24.8FP, 실적 : 33.5FP)

완료

세부추진실적

별첨

응용SW

운영 및

유지보수

❍ 사용자 요구사항에 의한 프로그램 개선 및 응대

구분	단순응대	프로그램 개선
3월	124건	5건
4월	382건	17건
5월	283건	10건
총계	789건	32건

완료

상용SW

유지보수

❍ SW별 제조사 정기점검 이행

- 월 정기점검 SW(5종) 3회, 분기점검 SW(1종) 1회

❍ 상용 SW 자체 정기점검 및 모니터링(매일) 실시

- 총11종 : 월 정기점검 3회

완료

2) 사업관리 분야 검사

❍ 투입인력 검사 결과 : 적정

구분	3월	4월	5월	비고
계획	5.0	5.0	3.5	단위 : M/M
실적	5.0	5.0	5.0

❍ 사업 공정 단계에 따른 산출물 작성 여부 검사

단계	산출물명	작성여부	비고
착수	사업수행계획서	완료
	품질활동계획서	완료
	테스트계획서	완료
	개발표준정의서	완료
	문서작성표준정의서	완료
	WBS(신규개발)	완료
단계별 보고	착수보고서	완료	착수보고회 : 2014. 3. 26
	주간업무보고서	완료	매주 1회 (총11회)
	월간업무보고서	완료	매월 1회 : 총 3회

※ 산출물  : 정보화사업관리시스템 게시

Ⅴ				별 첨

1. 부분 준공(1차) 세부 과업 이행 내용 및 검사 결과서 1부.

2. 세부 추진 실적(과업이행분야) 1부.