투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2지역 작업지시 8차 실정보고 승인 통보(2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)(구로,양천))

1. 대영GE14A-06-15(2014.06.19.)호와 관련입니다.

2.「2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(연간단가)(구로,양천)」와 관련하여, 작업지시 8차 실정보고에 대하여 검토한 결과, 원안대로 승인 통보하오니 작업추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 실정보고사항 승인 (작업지시 8차)

1) 장    소 : 공단우체국 외 7개 교차로

2) 작업내용 : 음향신호기 수리 7대, 교체 1대

3) 실정보고 승인사항

가) 음향신호기 1대 추가 교체 및 수리 1대 취소

- 변경된 총 작업물량 : 음향신호기 수리 6대, 교체 2대

- 작업물량변경사유 : 맞은편 음향신호기와의 호환성 불량에 따른 교체 1대 추가 및

수리대상 1대는 정밀점검결과 상태 양호로 수리 취소

나) 작업기간 연장

- 당 초 : 2014.05.26 ~ 2014.06.27

- 변 경 : 2014.05.26 ~ 2014.07.11

- 연장사유 : 도로교통공단 기능검사 실시 일정에 따른 공기부족

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	대영유비텍(주) 책임감리원,(주)넥선 현장대리인
주무관	박태진		주무관	한영호		기전과장	06/23 박재경
협조자
시행	기전과-7698	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 마곡동 67-1(양천로 237)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개