문서번호	교량보수과-3781
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교량보수과장	서부도로사업소장
정상모		구현모	06/23 김만수
협조	관리단속과장		김병철
	주무관		홍용현

책임감리용역 준공기한 변경보고

- 두모교, 홍제천고가교 내진성능개선공사 -

2014. 6

서부도로사업소

(교량보수과)

내진성능개선공사 책임감리 준공기한 변경보고

우리사업소에서 시행중인 『두모교 외 1개소 내진성능개선공사』의 책임감리원

으로부터 준공기한 변경(연기) 요청이 있어 조치계획을 보고 드림

사업 개요

사 업 명 : 두모교 및 홍제천고가교 내진성능개선공사 책임감리용역

사업기간 : 2013. 6.12 ~ 2014. 7.11

사업내용 : 내진성능개선공사 책임감리 (공정관리, 품질관리, 안전관리)

감리용역비 : 358,153천원

감 리 자 : ㈜신명건설기술공사

추진 사항

두모교 외 1개소 내진성능개선공사 책임감리 시행

┏ 두모교 (시행중)  : 받침교체 178개소 중 134개소 완료

┃                  전단키 103개소중 36개소 완료, 감쇠기 16개소 설치준비중

┗ 홍제천고가교(공사완료) :전단키 4개소, 면진받침 교체 61개소

책임감리 준공기한 변경(연기)사유 및 산출근거

연기 사유

1) 동절기 공사 중지에 따른 책임감리 과업 일시 중단 (42일)

2) 두모교 내진성능개선공사의 준공기한에 맞추어 과업 연장 (9일)

과업기간연장 (51일)

1) 동절기 공사중지 기간 : 42일 (2014. 1.18 ~ 2014. 2.28)

2) 두모교 준공기한에 맞추어 과업기간 추가 : 9일

□ 추가사유 : 공사중지에 따른 책임감리 준공 연장일이 2014. 8.22이 되나

공사준공일(8.31)보다 감리준공이 앞서게 되어 조정 필요 (+9일)

3) 용역기간 연장일수 : 총 51일 (42일 + 9일)

⇒ 7월 11일 (당초 준공) ＋ 51일 (과업연장) = 8월 31일 (변경기한)

조치 계획

동절기 공사 중지로 인해 책임감리 업무가 일시 중단되었고

“두모교 내진성능개선공사”의 안전, 공정 및 품질관리에 만전을 기하기 위해 두모교 내진공사 준공기한에 맞추어 책임감리용역 준공일을 연장코자 함

사 업 명	준 공 기 한		비 고
	당 초	변 경
두모교 외 1개소 내진성능개선공사 전면책임감리용역	2013. 6.12 ~ 2014.7.11	2013. 6.12 ~ 2014. 8.31	과업기간 연장에 따른 책임감리비 증가 없음

따로붙임 : 책임감리 용역기간 연장요청서 및 내역서.    끝.