문서번호	한양도성도감-5656
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
이정식		문인식	06/23 권기홍
협조

돈의문터~서소문터 멸실된 한양도성 연결방안 기획

기술용역 계약기간 변경계획

2014.  6.

문화관광디자인본부

(한양도성도감)

돈의문터~서소문터 멸실된 한양도성 연결방안 기획

기술용역 계약기간 변경계획

Ⅰ		용역 개요

□ 용 역 명 : 돈의문터 ~ 서소문터 멸실된 한양도성 연결방안 기획용역

□ 용역기간 : ’14. 3. 31 ~ ’14. 6. 28

□ 용역기관 : 서울시립대학교 산학협력단 + 공일스튜디오

□ 계약금액 : 20,150,000원

Ⅱ		그간 추진경위

□ ’14. 03. 31  용역계약 체결 및 착수

□ ’14. 04. 10  착수보고

□ ’14. 04. 24  1차 자문회의

- 참석대상 : 자문위원 2, 한양도성도감과장, 용역수행사 등

□ ’14. 04. 30  시장 보고 (1차) – 기본구상(안)

- 참석대상 : 시장, 자문위원 2, 문화관광디자인본부장, 용역수행사 등

□ ’14. 05. 30  2차 자문회의

- 참석대상 : 자문위원 2, 문화체육정책관, 용역수행사 등

Ⅲ		변경 내용

: 계약기간 연장

최초 계약기간	금회 연장	비고
’14.3.31~6.28	’14.3.31~7.31	33일 연장

※ 계약금액 변동 없음.

Ⅳ		변경 사유

□ 한양도성 단절구간 연결의 선도사업으로 전체 사업의 방향성과 기준을 잡는 중요한 사업으로 심도 있는 검토를 위해

- 현재 추진 중인 ‘한양도성 단절구간 연계성 회복을 위한 기본계획 및 실시설계용역’ 과 기본방향 공유 및 검토시간이 필요하며,

- 한양도성자문위원회, 시장보고 등에 필요한 충분한 기간 반영이 요구됨.

□ 또한, 대부분 사유지구간으로 기본구상이 완료될 경우 사전 시민과 협의과정이 필요한 점 등을 감안할 때

용역수행에 필요한 절대기간이 부족하므로 계약기간을 연장하고자 함.

Ⅴ		행정 사항

□ 용역수행자(서울시립대학교 산학협력단 + 공일스튜디오)와 계약기간 연장 합의

□ 기술용역 계약기간 연장요청 (재무과).  끝.