보고서(급수공사연기)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
남상욱	김태형	06/23 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-14622

광진구상수도공사 감독업무 수행중 ***********외 3개소 수요가로부터 급수공사 연기 요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

2014. 06. 20.

보고자 : ***********************

제목 : 급수공사 연기 보고

□ 공사현황

연번	주소	수요가명	공사기간	지시번호	비고
1	*************	***	2014.06.14~06.23	신설-33
2	*************	***	2014.06.14~06.23	신설-32
3	*************	**** *****	2014.06.11~06.20	신설-21
4	**************	***	2014.06.11~06.20	개량-5

□ 연기요청사항

연번	주소	수요가명	연기요청 사유	공사연기 기간
1	*************	***	신축현장 타 공정지연으로 인한 일정 협의	2014.06.30
2	*************	***	신축현장 타 공정지연으로 인한 일정 협의	2014.06.30
3	*************	**** *****	신축현장 하수도병행공사로 하수도시행 후 작업예정	2014.07.04
4	**************	***	신축현장 타 공정지연으로 인한 일정 협의	2014.07.02

□ 검토결과

○ 상기 위치에 대하여 수요가 요청에 의한 일정 재협의로 공사기간 내 공사가 어려워 공사기간을 아래와 같이 연기하고자 합니다.

연번	주소	수요가명	당초 공사기간	변경 공사기간
1	*************	***	2014.06.14~06.23	2014.06.14~2014.06.30
2	*************	***	2014.06.14~06.23	2014.06.14~2014.06.30
3	*************	**** *****	2014.06.11~06.20	2014.06.11~2014.07.04
4	**************	***	2014.06.11~06.20	2014.06.11~2014.07.02

□ 귀책사유 : 동부수도사업소

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

첨부 : 공사연기 요청서 4부(따로붙임).  끝.