문서번호	급수운영과-14938
결재일자	2014.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★급수운영과장
이용호		06/23 조면행
협 조
	시설관리과장			이자원
	주무관			이상무

“직결급수 전환 불가능 주택”

직결급수 전환실적에 따른 향후 실적 증대 계획

2014. 6

강서수도사업소

(급수운영과)

“직결급수 전환 불가능 주택”

직결급수 전환실적에 따른 향후 실적 증대 계획

우리사업소 지역 소형물탱크사용주택 직결급수 전환 추진 실적(5월)에 따른 향후 증대 방안을 수립하여 추진에 만전을 기하고자 함.

관련근거 :『소형물탱크 철거 및 직결급수 전환』추진 철저(배수과-3805;2014.6.11)

추진 현황

□ 추진실적 : 1 ~5월

(단위 : 개소)

구 분		계	수압부족 등				수요가 반 대	비 고
			소계	수압부족	관노후	관경협소
총 계	대상	268	19	3	7	9	249
	실적	143	7	-	3	4	136
	추진율 (%)	53.3	36.8	0	42.8	44.4	54.6

- 수요가에 대한 적극적인 홍보와 이해설득으로 전체 추진실적은 비교적       양호(53.3%)하나

- 수압부족, 관노후, 관경협소 등은 옥내배관 개량이 수반되어야 가능하므로

추진실적이 비교적 저조(36.8%)하여 집중 관리가 필요

□ 추진기간 : 2014. 1. ~ 10.

실적저조 대상별(수압부족, 관노후, 관경협소) 실적증대 방안

□ 수압부족(3개소)

- 수압이 낮은 지역을 직결급수 가능 수압으로 조정하여 추진

∙ 배수지수계를 가압수계로 조정

∙ 배관정비(D=80mm, L=150m 부설) : 9월 시행

- 수압 조정 후 곧 바로 직결급수 시행

□ 관노후, 관경협소(16개소)

- 지역담당자가 1:1 개별적으로 집중관리하여 시행

∙ 지역담당자별 가가호호 직접방문 홍보 및 이해 설득(홍보문 활용)

∙ 소형물탱크청소 의무화 시행(2014년 하반기) 안내문 배포

- 옥내배관 개량 및 구경확대 공사가 동반해야 가능하므로 옥내배관교체   지원사업과 병행 추진(지원안내문 배포)

- 소형가압펌프(저소음하향식) 설치 필요시 펌프는 수요가에서 구매토록하고 설치는 사업소에서 시행(연간단가업체 활용)

행정 사항

□ 실적 증대계획안 본부(배수과) 보고 시행

붙임 : 1. 홍보자료(직결급수홍보문, 공사비지원안내문, 청소의무화시행안내문) 각 1부.  끝.