공사감독일지(소방안전교실 개선 및 지진체험시설 신설 공사)
소방행정과-9019		담당자		홍보팀장	소방행정과장
현 장 : 3층 소방안전교실 (1층 로비 및 복도, 계단)		정승기		김영숙	09/16 임영진
기 간 :2019 09. 02.~ 09.11.(3~4주)
일자	확인사항
’19.09.02 ~09.04	목공작업–자동차모형/석고보드 전기작업-배선 및 인입 경량철골-몰딩 및 석고보드 금속작업-등박스 도장작업-계단실퍼티
’19.09.05 ~09.08	목공작업-문틀시공/바리솔타공 전기작업-배선 및 콘센트시공 경량철골-석고보드 금속작업-등박스/철공시공 도장작업-계단실퍼티/샌딩/도색 영상통신선배관 및 인입 탁트이동설치
’19.09.09 ~09.11	목공작업-목재틀,등박스,합판취부 전기작업-전기배선/천정타공 경량철골-흡음재시공/천정공사 도장작업-계단실도장/3층퍼티
’19.09.10	소방안전교실 공사 공정 회의

끝.