문서번호	급수설비과-3847
보존기간	년
결재일자	2014.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관	급수설비과장	급수부장
김형준	김인환	06/24 이상홍
협 조

급수공사 감독대행 주간실적 보고

2014. 6.23

상수도사업본부

(급수설비과)

급수공사 감독대행 주간실적 보고

상수도공사 시공감독업무 위탁과 관련하여 급수공사 감독대행 주간실적 검토회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ. 시공감독 위탁현황

□ 위탁개요

○ 위탁대상

- 급수공사 및 인입관 철거 ․ 폐쇄(포장복구 포함) : 39,000건

- 긴급누수복구공사(포장복구 포함)              : 49,000건

○ 위탁기간 : 2013. 5. 25 ~ 2015. 5. 24

○ 계약금액 : 9,131,891,000원

○ 도 급 자 : (주)이준엔지니어링, (주)건양엔지니어링

□ 인력현황

○ 근무인원 : 31명

- 상주 : 28명(중급 8명, 초급 20명), 비상주 3명

Ⅱ. 검토회의 및 주간실적

□ 검토회의

○ 일   시 : 2014. 6. 23 (월) 14:00~14:50

○ 장   소 : 급수부 회의실

○ 참 석 자 : 4명 ( 담당주무관, 기술지원감독대행자 비상주 3명)

○ 회의내용 : 주간실적 검토 및 지시사항 전달

□ 추진 실적

○ 급수공사(상주감독대행자)

- 기 간 : 2014. 06. 09 ~ 06. 15.

구 분		감독대행			현 장 입회율 (%)	부설연장 (m)	시정조치 (건)
		계	현장입회 (건)	사후확인 (건)
금 주		403	403	0	100	819	8
누계	’14.1.1이후	6,638	6,595	43	99.40	20,430	192
	’13.5.25이후	19,390	19,160	230	98.80	63,832	526

- 시정조치 : 안전 2, 자재 2, 토공1, 기타 3건.

○ 포장복구공사(상주감독대행자)

- 기 간 : 2014. 06. 09 ~ 06. 15.

구 분	계			급수공사업체 복구			포장업체 복구
	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)	감독대행 (건)	현장입회 (건)	입회율 (%)
금 주	264	239	90.50	63	63	100	201	176	87.60
누 계	4,590	4,071	88.70	1,413	1,400	99.0	3,177	2,671	84.10

○ 상주감독대행자 상호 업무지원

- 기 간 : 2014. 06. 09 ~ 06. 15.

구 분	계			사업소 내			사업소간
	계	급수공사	누수복구	소계	급수공사	누수복구	소계	급수공사	누수복구
금주(회)	13	6	7	5	6	7	-	-	-
누계(회)	257	177	80	224	144	80	33	33	-

○ 사업소 순회 지도감독(기술지원감독대행자)

- 기 간 : 2014. 06. 16 ~ 2014. 06. 20.

구 분		계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
지도감독 (건)	급수	17	2	2	2	2	1	3	3	2
	포장기타		-	-	-	-	-	-	-	-
시정조치(건)		-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 시정 조치 : 없 음.

Ⅲ. 지시사항

○ 지중 매설물에 유의하여 시공 (특히 도시가스)

○ 우기철 포장복구 철저

- 공사 하자등의 문제 점 발생시 조속히 조치

- 민원발생 사전예방 및 발생시 친절한 안내

○ 공사장 안전관리 철저

○ 각종 지침에 대한 감리자 교육 철저

- 비상주감리는 현장점검 및 기술지도에 충실할 것

따로붙임 : 위탁감독대행 주간실적 각 1부.  끝.