문서번호	시설보수과-5116
결재일자	2019.9.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이생기		09/16 임준빈
협조

『제3처리장 침전지(B계열) 정밀안전진단 용역』

준공기한 연기보고

2019. 09.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제3처리장 침전지(B계열) 정밀안전진단 용역 준공기한 연기보고

우리 센터에서 추진하고 있는 “제3처리장 침전지 B계열 정밀안전진단 용역“ 에 대하여 준공기한 연기요청에 따라 정밀안전 진단에 만전을 기하기 위하여 준공기한을 연장하고자 함.(안전진단부-19-00112호(2019.9.16.))

1		용역개요

가. 공 사 명 : 제3처리장 침전지(B계열) 정밀안전진단 용역

***********************************

***********************

라. 용역개요 : 208,000㎥/일

****************************

2		보고내용

가. 연기사유

○ “중랑물재생센터 제3처리장 침전지(B계열) 정밀안전진단 용역” 정밀안전진단을 위한 침전지 내 물비우기가 기간 내 이루어지지 않아 용역기한 연기 요청이 있음.

○ 제3처리장 침전지 내부의 철저한 안전진단을 위해 본 용역 준공기한을  2019.11.26.까지 연기하고자 합니다.

나. **************************

****************

3		조치의견

○ 계약 상대자인 ******************에게 용역 준공기한연기내용을 통보하여 변경계약을 추진 하고자 합니다.

- ***************

따로붙임 : 준공기한 연기요청 1부.  끝