문서번호	토목부-16752
결재일자	2019.9.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
노순재		장종환	09/17 代이동훈
협조

설계도서 검토회의 결과보고

(퇴계로2단계 보행친화공간 재편 공사)

2019. 9

도시기반시설본부

(토 목 부)

설계도서 검토회의 결과보고

(퇴계로2단계 보행친화공간 재편 공사)

□ 회의개요

ㅇ 일  시 : 2019.9.10.(화)14:00

ㅇ 장  소 : 토목부 12층 회의실

ㅇ 참석자 : 11명 (보행정책과, 토목부, 방재부-조경, 시공사, 감리단)

ㅇ 안  건 : 설계도서 검토사항 및 공사중 교통소통대책 일정, 구간 협의

□ 주요 검토내용

1.	설계도서 검토 내용

연번	설계도서 검토내용	설계사 의견	비 고
1	무단횡단금지 분리대 철거수량 누락	반영
2	퇴계로4가 교차로 점용구간 확보를 위한 차선제거 및 도색(중앙선 이동)	반영
3	기존구조물 철거수량 누락(보도부, 판석 등)	반영
4	설계도서 상세도 누락(휀스위치, 차선도색 등)	반영
5	포장 절단수량 과다 반영	반영
6	무단횡단 금지봉 U턴구간 설계 제외	반영
7	식재 계획도와 수량 불일치	반영
8	차선도색 일부 설계 누락	반영

2.	공사중교통처리계획 관련

ㅇ 공사중교통소통대책기간(‘19.8.19~’20.4.30)중에 동절기가 포함되어 있어 공사연기 필요

☞ 향후 공사 상황에 따라 공사중교통처리계획 기간 변경 예정

ㅇ 공사중교통처리계획이 8개 구간으로 분할시공토록 되어 있어 공사기간이 늘어남에 따라 시민불편이 가중

☞ 교통운영과 심의 결과에 따라 재검토 필요(4개 구간)

3.	시험실 공간 확보 관련(비상주 검토의견)

ㅇ 사업구간이 시내중심부에 위치하여 공간확보가 어려움

☞ 시험항목이 많지 않아 외부 공인시험기관에 의뢰하고 시험실 임대료 삭제

□ 향후계획

ㅇ‘19. 9 : 공사중 교통소통대책 보완(구간 재조정)

ㅇ‘19. 9~11 : 금년 시공분(퇴계로2가 → 퇴계로4가 교차로) 공사시행

붙임 : 1. 사전검토 의견서 1부.

2. 회의참석자 명부 1부.

3. 현황사진 1부. 끝