문서번호	설비부-14305
결재일자	2019.9.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박도원		代마동훈	09/17 임정규
협조

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』

관급자재 납품기한 연장 검토보고

(부스터펌프)

2019. 09.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』

관급자재(부스터펌프) 납품기한 연장 검토보고

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』에 소요되는 관급자재(부스터펌프) 설치시기가 미도래하여 납품기한 연장에 대해 검토보고 드림.

1		공 사 개 요

○ 공 사 명: 남산예장자락 재생 기계설비공사

○ 공사규모: 공원 15,154㎡, 주차장 10,015㎡(버스 39대, 장애인 2대)

○ 용    도: 자동차관련시설(주차장 및 부대시설)

○ 공사기간: 2017. 09. 01. ~ 2019. 12. 31.

○ 공사금액: **************************************

○ 시 공 사: ㈜지정이앤씨 외 4개사

○ 책임건설사업관리단: ㈜동성엔지니어링

2		관 련 근 거

○ 관급자재 납품기한 연기요청[남산예장 감리 제2019-415(‘19.09.17.)]

3		계 약 현 황

품 명	계 약 자	계약금액	조달수수료	납품기한	비 고
부스터펌프	㈜두크	**********	******	**********

(단위 : 원)

4		검 토 내 용

○ 납품기한 연기

품 명	계약금액	납품기한		비 고
		당 초	변 경
부스터펌프	**********	**********	**********	계약금액 변동없음

(단위 : 원)

- 연기사유: 선행공정의 미시공에 따른 관급자재 납품기한 조정

- 귀책소재: 서울특별시 도시기반시설본부

- 지체상금 부과여부: 미부과

○ 건설사업관리단 검토의견

- 선행공정(건축 및 토목)의 공사기간 연장(추정 ‘20.12.31.)에 맞춰 부스터펌프 납품기한을 연기함이 적정한 것으로 판단됨.

5		보고자 의견

○ 관급자재 납품기한 연장이 감리자 검토의견과 같이 적정한 것으로 판단되므로 계약부서에 관급자재 변경계약을 의뢰하고자 함.

붙임  관련공문 1부.  끝.