＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경에 따른 계약의뢰 (대치동 968-3~984-6번지외 4개소 배급수관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인 『대치동 968-3~984-6번지외 4개소 배급수관 정비공사』에 대하여 설계 변경을 시행하고 계약의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 대치동 968-3~984-6번지외 4개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요 : 당초 D=20~300㎜, L=2,428m

변경 D=20~300㎜, L=1,958m(감 470m)

다. 계 약 자 : ************

라. 계약기간 : 2019.03.28. ~ 2019.09.23.

마. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비,시설비

노후 상수도관(배급수관)정비 - 41102

바. 하자기간 : 준공검사일로부터 3년

사. 변경금액                                               (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
도급비	***********	***********	************
공급가액	***********	***********	************
부가세	**********	**********	***********

붙 임 : 1) 설계변경 심의의견서 1부.

2) 설계변경 관련서류 각 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	고태우		급수운영과장	09/17 최춘근
협조자
시행	급수운영과-16376	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-4852	/전송	02-3146-4889	/	allstar@seoul.go.kr	/	부분공개(3)