문서번호	정수과-3865
결재일자	2014.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
안영환		현인식	06/24 정남기
협조
	행정관리과장		김용근

운반시간 감소에 따른

『사업장폐기물 처리용역 』 변경계약 계획

2014. 6

영등포아리수정수센터(정수과)

운반시간 감소에 따른

사업장폐기물처리용역 변경계약 계획

2014년도 『사업장폐기물 처리용역(단가계약)』과 관련하여 운반시간 감소에 따른 변경계약을 다음과 같이 추진하여 계약관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ 용역계약 현황

○ 계약명 : 사업장폐기물(무기성정수슬러지) 처리용역 단가계약(장기계속 연간단가)

○ 용역기간 : 2014. 6. 1 ~ 2016. 5. 31

○ 계약상대 : 처리자[진명기업(대표 최환준)], 운반자[임송농산(대표 양기훈)]

○ 계약단가(VAT제외)

- 처리단가 : 17,849원/톤

- 운반단가 : 영등포(17,322원/톤) 뚝도(14,457원/톤) 구의(14,760원/톤)

○ 계약금액 : 금687,725,940원(총 부기금액 : 금2,776,032,000원)

구 분	합계	2014년 (6.1~12.31)	2015년 (1.1~12.31)	2016년 (1.1~5.31)	비고
처리물량	75,600톤	18,600톤	41,000톤	16,000톤
금 액(원)	2,776,032,000원	687,725,940원	1,502,303,000원	586,003,060원

□ 변경계약 사항

○ 처리장소 및 운반시간 감소에 따른 운반비 감액

- 당초(설계) : 석경회(경기도 포천시 신북면 삼성당리 65-1)

- 변경(낙찰) : 진명기업(경기도 김포시 안진골로 64번길 13-14)

○ 정수센터별 운반단가 변경내역

구분		당초	변경	감액	비고
영등포	금액	17,322원/톤	9,568원/톤	-7,754원/톤	VAT제외
	운반시간	230.12분	121.18분
뚝도	금액	14,457원/톤	12,732원/톤	-1,725원/톤	“
	운반시간	189.83분	165.9분
구의	금액	14,760원/톤	14,123원/톤	-637원/톤	“
	운반시간	189.51분	181.06분

○ 용역비 변경내역

- 총 용역비 : 금2,487,199,280원(감288,832,720원)

- 1차 용역비 : 금604,882,520원(감82,843,420원)

- 운반비 감소에 따른 계약금액 조정내역                           (단위:원)

구 분		당 초	변 경	변동사항	비 고
총용역비		2,776,032,000	2,487,199,280	-288,832,720
차수별	1차(2014)	687,725,940	604,882,520	-82,843,420
	2차(2015)	1,502,303,000	1,353,849,200	-148,453,800
	3차(2016)	586,003,060	528,467,560	-57,835,500

□ 향후 일정

○ 2014. 6. 24 : 변경계약 시행

○ 2014. 6. 25 : 변경계약 의뢰(재무과)

○ 2014. 7.  1 : 변경계약 체결

○ 2014. 7.  2 : 변경계약 통보(뚝도, 구의)

붙 임 : 1. 합의서 1부.

2. 변경 내역서 1부.  끝.