문서번호	정보공개정책과-12521
결재일자	2014.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기록관리팀장	정보공개정책과장
최동운	代김해수	06/24 조영삼

서울광장 기록수집 및 콘텐츠 개발 사업 주간 업무보고 2014.6.16.(월) ~ 6.20.(금)

2014. 6.

행 정 국

(정보공개정책과)

서울광장 기록수집 및 콘텐츠 개발 사업 주간 업무보고 2014.6.16.(월) ~ 6.20.(금)

	【사업개요】
□ 사업기간 : 2013.12.30.~2014.7.28. □ 사업내용 : 서울과장 관련 기록수집·정리, 기록정보 콘텐츠 제작·활용 □ 사 업 비 : 190,000천원 □ 수행기관 : 한국문헌정보기술(주) (PM : 윤정훈)

□ 추진현황

❍ 추진기간 : 2014.6.16.(월) ~ 6.20.(금)

❍ 진 척 률 : 66.2% (사업관리 78.8% / 수집‧조사 84.0% / 콘텐츠개발 45%)

□ 그간 추진내용

❍ 기록 수집·조사 및 분류·정리 추진 (계속)

- 서울광장 관련 기록 현황 파악 및 자료 요청·협의(국가기록원)

- 서울교통방송(TBS) 보유 서울광장 관련 영상 기록물 목록 검토

❍ 수집 후속작업 진행

- 감사패 제작 준비, 이용자확인서 수취 등

❍ 서울광장 수집기록 목록 정리 및 분류체계 보완

- 주제분류 검수 및 보완 진행 추진

- 수집기록 목록 검수 및 수정

❍ 비전자기록 디지털화 추진 (스캐닝, 인코딩 완료)

❍ 웹 콘텐츠 뷰어 사례조사 및 스토리텔링 연출 검토

- 웹 콘텐츠 1차 디자인 완료 및 웹 콘텐츠 테스트용 업로드

□ 검토 및 향후계획

❍ 서울광장 관련기록 소장기관 조사 및 자료요청 추진

- 국가기록원, 한국정책방송원, TBS 등 관련 기록 확인

❍ 서울광장 수집기록 목록 정리

- 수집기록 목록 검수 및 수정

❍ 시민인터뷰 준비

- 서울광장 관련인사 구술인터뷰 대상설정, 일정, 구술관련 서식 공유

- 주제 : 광복 전후, 한국전쟁 직후, 서울광장 조성관련, 기타 개인 추억

❍ 사료관리시스템 설치 준비

- 데이터 마이그레이션 준비를 위한 서울시 설치환경 검토

❍ 웹 콘텐츠 뷰어 플랫폼 개선 및 콘텐츠 선별작업, 웹디자인 구상

- 웹 화면 디자인 강화(웹 콘텐츠 2차 디자인)

- 팩션스토리텔링(구보씨 이야기) 10개, 아카이브 콘텐츠(연대기 5개, 주제 7개), VR로 구성 중

- 내부 관련 기관의 콘텐츠 내용 검토를 위한 사전 준비(서울시사편찬위원회)

- 콘텐츠 활용 관련 기능 보강 : 다운로드 아이콘 추가, 다운로드시 저작권 및 열람범위 등에 관한 ‘창’ 등

- 콘텐츠 관리 관련 기능 보강 : 웹 페이지 방문자 및 콘텐츠 다운로드 횟수 카운팅 기능 등

붙임 : 1. 주간보고(20차) 업무현황 보고서 및 회의록 각1부.

2. TBS 서울광장 영상기록 주제분류 목록 1부.  끝.