투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	실정보고 승인(종점부 본선교 P11.A2 시공에 따른 주변건물 사전조사)

1.문서번호 : SMIH-14-30231

2.작성일자 : 2014-06-24 10:06:31

3.제    목 : 실정보고 승인(종점부 본선교 P11.A2 시공에 따른 주변건물 사전조사)

4.내    용 :

가. 서영강남14 – 209(‘14. 6. 18)호와 관련입니다.

나. 강남순환4공구(종점부) 본선교 P11,A2 시공에 따른 주변 건물에 대하여 균열 등 안전성을 사전조사를 요청하는 실정보고를 승인하니 공사장 안전관리 및 민원대흥에 철저를 기하기 바랍니다.

1) 근  거 : 본선교 좌우에 존치하는 거상아파트 및 진성연립 등에 대한 소음.진동으로 인한 민원이 예상되어, 향후 피해보상 민원 등에 적극대처 하고자 함이 타당함.

2) 소요금액 : 15백만원. 끝.

주무관							시희식			도시고속도로과장					전결 06/24 代여용석
협조자
시행			토목부-11991									(						)		접수											(						)
우	120-715					서울시 중구 덕수궁길 15 서울시청서소문 2별관 3층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		3708-8662						/전송			3708-2599					/	shs9496@seoul.go.kr												/	대시민공개