투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	용역기간 변경 계약의뢰(시립노원시각장애인 복지관 재건축공사 건설폐기물 처리용역)

우리본부에서 시행중인 『시립노원시각장애인 복지관 재건축공사 건설폐기물 처리용역』의 용역기간 변경 계약을 아래와 같이 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역건명 : 시립노원시각장애인 복지관 재건축공사 건설폐기물 처리용역

나. 용 역 비 : *********

다. 계 약 자 : ㈜대길공영 외 1

라. 용역기간 : 2013. 01. 02 ~ 2014. 07. 01

마. 변경내용(용역기간)

구 분	용역금액(원)	변경전 용역기간	변경후 용역기간	비 고
총 차	***********	*********************	*********************	증)61일

바. 변경사유 : 건축공사기간 변경(‘14.08.31)에 따른 건설폐기물 처리용역 준공기한 연기함.(※ 용역기간 연기에 따른 향후 이의 제기치 않기로 함)

따로붙임 : 1) 용역기간 변경검토 보고서 1부

2) 준공기한 연기의뢰서 및 각서 제출 각1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정재흥		복지시설과장	조영수		건축부장	06/24 이병석
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	건축부-7664	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15. 2동 2층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2653	/전송	02)3708-2659	/	jjh5160@seoul.go.kr	/	부분공개