문서번호	하천관리과-10299
결재일자	2014.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	하천관리팀장	하천관리과장		물관리정책관
권혁정	김준형	한유석		06/25 정만근
협 조

준공기한 연기 검토 보고

2014. 6

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 탄천 등 8개 하천기본계획 및 하천시설 관리대작성 용역 -

준공기한 연기 검토 보고

□ 하천기본계획 수립 대상에 포함된 사당천과 반포천이 별도의 사업으로 추진중인 배수개선대책 설계용역 지연으로 하천기본계획상 홍수방어대안 반영이 곤란한 실정으로,

□ 최종 개선안 확정 시 하천기본계획에 반영하고, 전략환경영향평가 협의 등 잔여과업 수행을 위해 용역기간을 연장하고자 함

1		용역개요

□ 용 역 명 : 탄천 등 하천기본계획 및 하천시설 관리대장 작성

□ 용역기간 : ’12. 5. 3 ~ ’14. 6. 30

□ 용역규모

- 지방하천 12개소 하천 기본계획 수립 (L=53.68km)

- 하천시설 관리대장 작성

□ 용역업체 : (주)이산, (주)제일ENG종합건축사사무소, (주)동일기술공사

□ 용 역 비 : 1,279,492천원

2		준공기한 연기

□ 준공기한 연기내용

구 분	과 업 기 간	용 역 비	비 고
당 초	2012.5.3 ~ 2014.06.30	1,279,492천원	용 역 비 변동없음
변 경	2012.5.3 ~ 2015.02.20

□ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 연기사유

- 본 과업에 포함된 반포천, 사당천에 대한 배수개선 대책안 마련에 상당한 기간 소요되었으며, 추가적으로 결과물을 도출하기 위해 전문가들의 의견 수렴과 인허가 및 협의 등이 필요한 실정으로,

- 최종 개선안 확정 시 하천기본계획에 반영 및 전략환경영향평가 협의 등 잔여과업 수행을 위해 용역기한 연기가 필요함

3		향후계획

□ ’14. 6 ~ 7월 : 반포천, 사당천 배수개선안 기본계획 반영

□ ’14. 8월      : 수질오염총량 보고서 작성 및 협의 (물관리정책과)

□ ’14. 9~12월 : 전략환경영향평가서 작성 및 협의 (한강유역환경청)

□ ’15. 1~ 2월 : 보고서 작성 및 납품

붙임 : 관련 공문 1부. 끝.