다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	계약변경 의뢰[청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)]

우리과에서 시행 중인 『2014년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 신규공정 및 시공물량 증․감에 따른 설계변경 사항이 발생되어 아래와 같이 계약변경(1차) 의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년도 청사 전기설비 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 3. 2 ~ 2015. 2. 28

다. 계약금액 : 금174,362,670원

라. 계 약 자 : ㈜거 산     대표  엄재룡

마. 변경금액  : 금 187,110,000원, 증)12,747,330원

구 분		당초금액	변경금액	증․감	비고
총공사비		174,362,670원	187,110,000원	증) 12,747,330
도급비	공급가액	158,511,518원	170,100,000원	증) 11,588,482
	부 가 세	15,851,152원	17,010,000원	증) 1,158,848
	계	174,362,670원	187,110,000	증) 12,747,330

바. 변경사유

- 신규공정 발생 및 시공물량 증․감

붙  임 1. 설계변경 검토보고서 1부.

2. 작업완료 목록(1차)

3. 설계변경 내역서(1차) 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.

	총무과장
★주무관	이관호		시설관리팀장	최석기		총무과장	06/25 오형철
협조자	계약1팀장	김점선
시행	총무과-16662	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110 서울시청 7층 총무과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-5651	/전송	02-2133-0771	/	kwanho67@seoul.go.kr	/	부분공개