문서번호	토목부-12182
결재일자	2014.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	최광무	06/25 노우성

현장사무실 기간연장 실정보고 (선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

도시기반시설본부

(토 목 부)

현장사무실 임대기간 연장 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

총차 공사기간이 12개월 연장됨에 따라 현장사무실의 임대기간 연장 실정 보고에 대한 검토 보고임

□ 관련근거

○ 현장사무실 기간연장 실정보고(선사고덕0420-318호, ‘14. 5.30.)

□ 공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4, 6차로

○ 사업기간 : 2009. 1.06. ~ 2014.12.31.

○ 총사업비 : 115,048백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설외 1사

□ 보고내용

○ 실정보고 이유

- 공사구간내 현장사무실 신축부지가 없어 개인건물을 임대하여 사용중임.

- 총차 공사기간이 12개월 연장됨에 따라 현장사무실의 임대기간 연장 필요

○ 임대기간 연장 요구

구 분	당 초	변 경	비 고
현장사무실 기간연장	‘09.1.6~’13.12.31(60개월)	‘09.1.6~’14.12.31(72개월)	증)12개월

○ 단가검토

- 낙찰률 81.14%

- 강제협의율=(설계변경 당시를 기준으로 산정한 단가+동 단가에 낙찰률 곱한 금액)/2

= (100 + 81.14) / 2 = 90.57%

- 단가산출내역

구 분	단위	당초(천원)	변경(천원)	협의율(%)	비고
가설사무소 (36개월, 임대)	1식	226,000	226,000	92.34	기계약분
가설사무소 (12개월, 임대)	1식	-	73,900	90.57	추가분
계	1식	226,000	299,900

8. 공사물량 및 공사비 증감현황

(단위:천원)

구 분	단위	당 초		변 경		증‧ 감	비 고
		수 량	금 액	수 량	금 액
가설사무소	식	1	226,000	1	299,900	73,900
제 경 비	식		11,000		15,100	4,100
공사원가	식		237,000		315,000	78,000
부가가치세	식		23,700		31,500	7,800
도급공사비	식		260,700		346,500	85,800

□ 감리단 검토의견

○ 2013.12.31 전체(6회) 설계변경시 공사기간이 12개월 연장되었으며, 공사기간 연장에 따른 현장사무실 임대기간 변경은 ‘공사계약 일반조건 제7절 4. 그밖에 계약내용의 변경으로 인한 계약금액의 조정’ 사유에 해당하므로, 현장 사무실 임대기간을 1년 연장하여 도급내역에 반영함.

○ 본 내역서, 수량산출서 및 단가산출서는 제반 설계기준에 맞게 작성됨.

□ 조치계획

○ 감리단 검토의견 과 같이  총차 공사기간이 12개월 연장됨에 따라 현장사무실의 임대기간 연장은 필요함.

○ 증액되는 공사비 85,800천원에 대하여는 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙 임 : 1. 감리단 검토의견서 1부.  끝.