함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰

우리사업소에서 시행하고 있는『2013년 용산구 관내 상수도공사 (장기계속)』에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명 : 2013년 용산구 관내 상수도공사

2. 계약업체 : **************

3. 계약금액 : ************

4. 준공기한 연기내역

가. 계약기간 : 당초 2013. 07. 15 ~ 2014. 06. 30

변경 2013. 07. 15 ~ 2014. 07. 26

나. 연기사유 : 신축건물 급수공사신청 및 소ㆍ불출수 민원등 시민들에게 깨끗한 수돗물을 안정적인 공급하기 위하여 차기업체 선정시까지 공사기한 연기

다. 귀책소재 : 중부수도사업소

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임문서 : 1. 연기 보고서 1부.

2. 변경계약 합의서 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	김선호		급수설비팀장	이병운		급수운영과장	전결 06/25 김영삼
협조자
시행	급수운영과-12825	(		)	접수		(		)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	3146-2145	/전송	3146-2189	/	k*********@seoul.go.kr	/	부분공개(7)