설계변경(2차,최종) 심의 의견서

대시민공개

○ 공사명 : 2013년 강동구 관내 상수도시설물공사(연간단가계약)

신청 부서명	강동수도사업소 시설관리과
공사 감독원	지방시설주사보 황대룡
제출 년월일	2014. 06. 25

□ 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2014. 06. 25(수) 14:00

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이	의견을 제시함.

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

시설관리과장

이계환

06/25

이계환

타당함

위    원

주무관

이경재

이경재

타당함

위    원

주무관

김용현

김용현

타당함

위    원

주무관

가재덕

가재덕

타당함

위    원

주무관

송종범

송종범

타당함

위    원

주무관

송근호

송근호

타당함

담    당

주무관

황대룡

황대룡

설계변경(2차-최종) 사유서

□ 공사 현황

○ 공 사 명 : 2013년 강동구 관내 상수도 시설물공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : 당초-원형변실 198개소, 중형변실 51개소, 구형변실 9개소

변경-원형변실 101개소, 중형변실 18개소, 구형변실 0개소

○ 공사기간 : 2013. 5. 10 ~ 2014. 6. 30

○ 도 급 비 : 당초 – 546,530,650원

변경 – 365,200,000원【감)181,330,650】

○ 계약상대자 : 대원공업(주) 대표 양문선

□ 설계변경 세부내용 및 사유

○ 계약물량 변경

- 물량 증 : 콘크리트 포장깨기 등 72개 공종

- 물량 감 : 아스팔트 포장절단 등 236개 공종

○ 신규공종 발생

- 토공, 부설공, 구조물공, 부대공, 사급자재 등

□ 설계변경 변경내용 및 의견

○ 설계변경 내용                                         (단위 : 원)

구 분	당초 금액	변경 금액	비 고
총 공사비	654,814,650	498,493,000	감) 156,321,650
도 급 비	546,530,650	365,200,000	감) 181,330,650
관급자재비	108,240,000	133,293,000	증) 25,009,000

○ 설계변경 의견

- 신규공종은 없으며, 실제 시공에 따른 계약물량 증․감 사항을 반영한 사항      으로 설계변경은 타당함.

따로붙임 : 설계변경(2차-최종) 내역서 1부.  끝.