문서번호	급수운영과-12883
결재일자	2014.6.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
이보민		06/25 代공문수
협 조
	주무관		문홍덕
	주무관		박종태

설계변경(제1차-최종) 심의위원회 개최

「2013년 강남구 관내 급수공사 건설폐기물처리용역」

2014.   6.

설계변경(1차-최종) 심의위원회 개최

우리사업소에서 시행중인 「2013년 강남구관내 급수공사 건설폐기물처리용역」에 대하여 계약물량 감소에 따른 계약금액 변경으로 설계변경 심의위원회를 개최하여 설계변경 시행코자 함

가. 설계변경 현황

❍ 용 역 명 : 2013년 강남구관내 급수공사 건설폐기물처리용역(장기계속계약)

❍ 용역개요

- 당초 : 폐아스콘 1,845톤, 폐콘크리트 1003톤

- 변경 : 폐아스콘 1,129톤, 폐콘크리트  771톤

❍ 용역기간 : 2014.01.01 ~ 2014.06.30(총용역기간 2013.07.04~2014.06.30)

❍ 용역금액

- 당초 : 77,169,000원

- 변경 : 46,321,000원 (감액 30,848,000원)

❍ 계 약 자 : (주)홍명산업   대표  신용철

나. 심의위원회 개최

❍ 심의위원장 : 급수운영과장(대직 시설6급 공문수)

❍ 심의위원 : 급수운영과 시설6급 (박종태ㆍ문홍덕)

❍ 개최일시 및 장소

- 일시 : 2014. 6. 25(수)  10:00

- 장소 : 급수운영과

다. 심의내용

❍ 계약물량 증감 및 제경비 적정산정 여부 등 기타 설계변경 사항

- 물량변동의 적정성 여부

- 계약변동(증ㆍ감) 물량 계약단가 낙찰률 적용 적정 여부

- 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

설계변경(제1차-최종) 요약 보고

용 역 명 : 2013년 강남구관내 급수공사 건설폐기물처리용역(장기계속계약)

변경사유

❍ 폐기물 계약물량 감소에 따른 변경 : 6개 공종

❍ 용역 개요

공 종	단위	당 초	변 경	비 고
계	톤	2,848	1,900	감) 948
폐아스콘 처리	톤	1,845	1,129	감) 716
폐콘크리트 처리	톤	1,003	771	감) 232

계약금액변경                                           단위 : 원

구분	당 초	변 경	증 , 감
총 용역비	77,169,000	46,321,000	감) 30,848,000
공급가액	70,153,636	42,110,000	감) 28,043,636
부가가치세	7,015,364	4,211,000	감) 2,804,364
계	77,169,000	46,321,000	감) 30,848,000

붙임 : 설계변경 내역서 1부. 끝

설계변경 심의 위원회

일  시 :  2014. 6. 25(수) 10:00

장  소 :  급수운영과

안  건 : 2013년 강남구 관내 급수공사 건설폐기물처리용역(장기계속계약)에 대한 1차(최종) 설계변경 심의

설계변경 사유 : 계약물량 감소에따른 금액변경

심의 결과

구 분	직위	심의결과	성 명	비 고
위원장	급수운영과장 (대직 시설6급)		공 문 수 (인)
위 원	급수운영과 시설6급		박 종 태 (인)
위 원	급수운영과 시설6급		문 홍 덕 (인)

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.