문서번호	시설관리과-9327
결재일자	2014.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설관리과장
이승철		06/26 김영훈
협 조

2013년 북부도사업소 관내 긴급누수복구공사 설계변경(최종) 심의 위원회 개최

2014. 6

설계변경(최종) 심의위원회 개최

『2013년 북북수도사업소 관내 긴급누수복구공사 』 공사 종료에 따른 물량 증감 사항이 발생됨에 따라 설계변경 내용을 심의코자 함.

1. 계약 현황

가. 공 사 명 : 2013년 북부수도사업소 관내 긴급누수복구공사 (장기계속)

나. 계약금액 : 2,062,147,210원

나. 계약자 : 건림건업(주) 오태문

다. 계약일자 : 2014. 07. 03

라. 준공기한 : 2014. 06. 30

2. 심의회 개최

가. 심의일정 : 2014년 6월 26일(목) 09:30 ~ 10:30

나. 심의장소 : 북부수도사업소 시설관리과

라. 심의위원 : 위원장(시설6급 임종진)

위원(시설6급 김만재, 시설6급 김창열, 시설7급 이문성, 시설7급 유광창)

3. 심의 내용

○ 물량 및 품의 적정성 검토

4. 설계 금액 변경 내역

구 분	변 경 전	변 경 후	증 ㆍ 감
공급가액	1,874,679,282	1,440,327,273	-434,352,009
부 가 세	187,467,928	144,032,727	-43,435,201
도 급 액	2,062,147,210	1,584,360,000	-477,787,210

5. 행 정 사 항

○ 위와 같이 설계변경 사항에 대하여 적법성 여부를 검토 및 심의하고,

○ 심의 검토결과를 내역에 반영 조치하고자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 심의신청서 1부.

2. 설계변경 내역서1부. 끝.