함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(2차-최종) 계약의뢰(2013년 강동구 관내 상수도 시설물공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 『2013년 강동구 관내 상수도 시설물공사(장기계속단가계약)』에 대하여 설계변경(2차-최종) 심의를 완료하고 아래와 같이 변경 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 2013년 강동구 관내 상수도 시설물공사(장기계속단가계약)

나. 계약상대자 : 대원공업㈜  대표 양문선

다. 계약기간 : 2014.01.01~2014.06.30(총공사 부기기간 : 2013.05.06~2014.06.30)

라. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후밸브정비)

소방용수시설 등의 설치 및 관리, 소방용수시설 설치

소방용수시설 등의 설치 및 관리, 소방용수시설 보수

마. 설계변경 및 차수별 금액변경 사유

- 계약물량 증․감에 따른 변경

바. 설계변경 내역                                            (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 부기금액	도 급 비	546,530,650	365,200,000	감)181,330,650
1차수 금액	도 급 비	246,334,000	246,334,000	-
2차수 금액	도 급 비	300,196,650	118,866,000	감)181,330,650

붙 임 : 내부품의서 및 합의서 각 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	황대룡		주무관	송근호		시설관리과장	전결 06/26 이계환
협조자
시행	시설관리과-9637	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-2760	/전송		/	daeryong@seoul.go.kr	/	대시민공개